문서번호	건축부-22028
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
송옥의	차무흥	전결 12/20 代박범규
협 조
	경리과장		최정수

『서울역7017프로젝트 건설공사(건축)』

총차 및 3,4차분 설계변경 검토 보고

2017. 12.

도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울역7017프로젝트 건설공사(건축)』

총차 및 3,4차분 설계변경 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)」에 대한 실정보고 승인과 설계변경

자문위원회 자문결과를 반영한 건설사업관리단의 설계변경 요청에 대한 검토 보고임

1		공사개요

공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)

위    치 : 서울역고가도로(서울시 중구 남대문5가527~만리동1가62)

규    모 : 엘리베이터5개, 에스컬레이터1개, 고가하부편의시설 4개 고가상부편의시설 16개, 서울역파출소

공사기간 :  2016.05.26 ~ 2017.12.31(총차)

2016.05.27 ~ 2017.04.15(1차)

2016.12.28 ~ 2017.04.26(2차)

2017.02.24 ~ 2017.12.31(3차)

2017.09.05 ~ 2017.12.31(4차)

공 사 비 :  8,774,936,930원(총차)

시 공 사 : 금성종합건설(주)

감 리 자 : ㈜진우엔지니어링코리아/(주)신명건설기술공사/(주)스튜디오엠오비 건축사무소 한동석

2		추진경위

‘16. 05. 27 : 공사착공

‘17. 04. 15 : 1차분 준공

‘17. 04. 26 : 2차분 준공

‘17. 09. 05 : 4차분 착공

‘17. 11. 17 : 준공기한 연장(’17.11.21 →‘17.12.31)

‘17. 12. 11 : 설계변경본부위원회심의

3		공사비 변경 내용

관련근거 및 변경내용

***********

************************************************

****************************

************************************************

*************************

***********************************************

*****************************

***************************************************

*********************************

***************************************************

*************************

************

************************************************

*********************

************************************************

***********************

*************************************************

***************************

**************************************************

***********************

****************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**

***********************

**********************************************************************************

***************

**************************************************************************

따로붙임 : 1) 실정보고 검토 보고 3부.

2) 설계변경내역서 1부(총차, 3차, 4차).   끝.