	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2017년 가산동 송배수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행중인『2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비     공사』에 대하여 설계변경을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : 당초  D=150~600mm,  L=2,161m

변경  D=150~600mm,  L=1,998m

다. 공사기간 : 2017.5.1. ~ 2017.12.31

라. 계 약 자 : (주)왕산건설  대표 김재운

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
도 급 비	819,333,900	764,214,000	감) 55,119,900
공급가액	744,849,000	694,740,000	감) 50,109,000
부가세	74,484,900	69,474,000	감) 5,010,900

바. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감 및 신규공종 발생

사. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후송배수관정비)

따로붙임  설계변경 시행 및 관련서류 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	12/20 代이일로
협조자
시행	급수운영과-30965	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)