＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역)

우리 부서에서 추진중인 용역사업에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역

나. 계 약 자 : 대영유비텍(주) (대표 조근환)

다. 계약금액 : 금182,158,00원

라. 계약기간 : 2013.09.09.~2017.12.29.

마. 준공기한 연기 내역

- 당 초 : 2017. 12. 29.

- 변 경 : 2018.  6. 10.

바. 연기사유 귀책소재 : 서울시(서울주택도시공사)

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 준공기한 연기사유 : 내곡보금자리주택 택지 지구계획변경 및 여의천 인도교 신설에 따른 교통신호기공사 준공기한 연기

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	교통운영과장
★주무관	이귀섭		신호시설팀장	구봉서		교통운영과장	12/20 代박동욱
협조자
시행	교통운영과-24442	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층	/
전화	2133-2483	/전송	2133-1053	/	lksoub@seoul.go.kr	/	대시민공개