문서번호	토목부-26922
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
윤효진		진재섭	12/20 김영수
협조	주무관		박상철
	주무관		이한규

용역 설계변경(전체1회, 1차2회) 검토

(밤고개로 확장공사외1 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

2017.12

도시기반시설본부

(토 목 부)

용역 설계변경(전체 1회, 1차분 2회) 검토보고

【밤고개로 확장공사외1 감독권한대행등 건설사업관리용역】

공사 시행 중 현장여건에 따른 건설사업관리기술자의 투입일정과 인원조정, 설계용역 등을 반영함에 따른 준공기한 연기 및 용역비 변경 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 밤고개로 확장공사 외1 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 규    모 : 도로확장 6차로 → 7~8차로, 총연장 L=1.845㎞

○ 용역기간 : 2017.1.1.~2018.12.30. (1차 : ’17.1.9~’17.12.31)

○ 용 역 비 : 1,048백만원 (1차 : 643백만원)

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 1

□ 설계변경 검토

○ 감리용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
전체(1회)	용 역 비	1,048,700,000	1,781,700,000	증 733,000,000
	용역기간	‘17.1.9. ~ ‘18.12.30.	‘17.1.9. ~ ‘18.12.30.	감 1.36개월
1차(2회)	용 역 비	634,500,000	1,617,210,000	증 937,710,000
	용역기간	‘17.1.9. ~ ‘17.12.31.	‘17.1.9. ~ ‘18.8.31.	증 7.59개월

- 투입일정 변경 현황(전체)

(단위 : 인·월)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
책임기술자(토목특급)	24.00	22.64	감 1.36
토목분야기술자(고급)	22.79	22.77	감 0.02
토목분야기술자(중급)	24.00	21.73	감 2.27
안전분야기술자(중급)	12.00	-	감 12.00
조경분야기술자(중급)	3.00	9.86	증 6.86
전기분야기술자(중급)	2.00	15.00	증 13.00
기술지원 기술자	24.00	22.64	감 1.36

- 투입일정 변경 현황(1차)

(단위 : 인·월)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
책임기술자(토목특급)	11.41	19.00	증 7.59
토목분야기술자(고급)	11.55	19.18	증 8.26
토목분야기술자(중급)	10.50	18.14	증 7.64
안전분야기술자(중급)	6.55	-	감 6.55
조경분야기술자(중급)	6.55	8.41	증 1.86
전기분야기술자(중급)	10.73	13.55	증 2.82
기술지원 기술자	11.41	19.00	증 7.59

※ 변경사유 : 건설사업관리기술자 투입일정과 인원을 현장여건 등을 고려하여 조정

- 실시설계 및 교통소통대책 용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
밤고개로 확장공사 2구간(SH구간) 기본 및 실시설계 용역		180,000,000	증 180,000,000
밤고개로 확장공사 교통소통대책 및 차로변경 교통처리계획 용역		113,410,000	증 113,410,000
종로 중앙버스전용차로 설치공사 감리용역		411,500,000	증 411,500,000

※ 변경 사유

· 밤고개로 확장공사에 SH구간(2구간)이 포함됨에 따라 설계 및 교통 소통대책 용역시행

· 밤고개로 감리 용역에 종로 중앙버스 전용차로 설치공사 감리 용역을 포함하여 시행

□ 조치의견

○ 현장여건에 따른 건설사업관리기술자 투입일정과 인원조정, 설계용역 등을 포함하여 설계 변경함이 타당하다고 사료됨.

붙임 1. 설계변경 내역서(전체, 1차) 및 검토의견서 각 1부.

2. 건설사업관리기술자 합의각서 1부.

3. 관련 방침서 각 1부.  끝.