문서번호	급수운영과-29453
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장		중부수도사업소장
이상현	代최성태	代박장진		12/21 유경애
협 조
	주무관		은정호

「한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사」

2017년 회계연도 세출예산 이월 시행

2017. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사」

2017년 회계연도 세출예산 이월 시행

우리 사업소에서 시행중인「한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사」와 관련하여 본 공사에 대한 2017년 회계연도 세출예산 이월을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 본부 기획예산과-11846(2017.12.12.)호

“2017년 회계연도 세출예산 이월 대상사업 제출요청”

2		공사현황

○ 공 사 명 : 한남테니스장~동국대입구역 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=200~700mm, L=1,735m

○ 공사기간 : 2017.05.22. ~ 2018.06.28.

○ 계약업체 : **************

○ 도 급 비 : **************

○ 감 독 자 : 서울시설공단 이정복

3		이월사유

□ 준공기한 연기로 인한 사고이월

○ 당초 준공일이 ’17.12.27.이였으나 ’18.06.28.까지 공사 연기

○ 연기 사유 : 절대공기 부족

- 공사 진행 도중 예상치 못한 암반구간 약 400m 확인

- 당초 30m+α/일 관로 부설로 공기산출 하였으나, 암반 구간에서 관부설 일평균 6m 내외의 열악한 작업 여건으로 인해 잔여공정에 대한 절대공기가 부족하며

- 겨울철 굴착통제로 인해 금년도 공사 불가하여 연기 필요

4		예산내역

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(노후 송배수관 정비)

○ 집행내역　                                                 (단위 : 천원)

예산액	배정액	지출원인행위액	지출액	사고이월액	불용액
*********	*********	*********	*******	*********	*******

※ 불용액 : 낙찰차액 *********

5		조치의견

○ 상기와 같이 절대공기 부족으로 금년도 공사완료가 불가하여 준공기한을 연기 조치한 사항으로 본 공사를 사고이월하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 :  1. 사고이월 사업별 명세서 1부.

2. 사고이월 요구서 1부.

3. 준공기한 연기 방침 1부.  끝.