문서번호	건축부-22048
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
양수지		차무흥	12/21 代박범규
협조

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

석면해체, 제거 공기연장 검토 보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립노원청소년직업체험센터 신축공사』

석면해체, 제거 공기연장 검토 보고

「시립노원청소년 직업체험센터 신축공사」의 부지내 철거대상 건축물에 대한 석면해체·제거공사를 아래와 같이 검토하고 연장 처리하고자 함.

1		준공기한 연장검토

1. 관련근거

○ ㈜제이제이개발의 요청문

- 관할 노동부의 석면 해체·제거 작업 신고후 신고 필증교부등의 절차로공사기한 부족

2. 준공기한 연장검토

○ 고용노동부 신고 및 필증교부등 행정절차기간의 소요로 11일의 공기연장이 불가피 함.

○ 변경내용(용역기간)

용역명	당초계약기간	변경계약기간	비 고
************************	********************	******************	******

[용역계약 개요]

○ 시립노원청소년직업체험센터 석면해체.제거작업

***********************************

********************************************

*************************************

2		추진경위

○ 2017.12. 5.  : 시립노원청소년직업체험센터 추가석면 용역발주

○ 2017.12. 7. : 석면 해체·제거공사 계약 의뢰

○ 2017.12.18. : 석면 해체·제거공사 공사기간 연장 요청

3		처리의견

○ 준공기한 연장 처리코자 함.

붙 임  : 석면 해체·제거공사 계약기간 연장 요청문 1부.    끝.