문서번호	건축부-22065
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장		시설국장
정호기	조영수	代박범규		12/21 류훈
협 조

「서울혁신파크 1단계 조성공사」

공사기간 연장 검토 보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

「서울혁신파크 1단계 조성공사」

공사기간 연장 검토 보고

「서울혁신파크 1단계조성공사」에 대하여 건설사업관리자로부터 12월 동절기 한파에  따른 콘크리트 품질확보 및 레미콘 수급 일정 불안정으로 공사기간 연장요청이 있어 검토 보고 드림

Ⅰ		공사현황

□ 공사개요

- 계  약  명 : 서울혁신파크 1단계 조성공사

- 위     치 : 은평구 녹번동 통일로 684(녹번동 5번지 일대)

- 규     모 : 지하1층 지상5층, 연면적 12,608㎡(리모델링), 증축:829㎡

- 용     도 : 교육연구시설(9,10,15동), 근린생활시설(홈베이스동)

- 계 약 자 : ㈜씨스페이스건설, 청도건설(주), 고원건설(주)

- 계약금액  : 10,899,130,000원(2차: 9,987,586,000원)

- 공사기간 : 2016.12.30.~ 2017.12.26(2차:2017.2.17.~2017.12.26.)

- 감 리 자 : ㈜종합건축사사무소 동일건축

□ 추진경위

- `16.12.30 : 공사착수

- `17.02.17 : 2차공사 착수

- `17.12.15 : 동절기 공사기간 연장실시(‘17.12.15→17.12.26)

- `17.12.20 : 공사기간 추가연장요청(건설사업관리단→건축부)

Ⅱ		공사 기간 연장 사유

□ 공사기간 연장요청 사유

- 동절기 야외 토목공사중 기온급강하로 옥외 콘크리트 양생 어려움

․12월 평균기온 급강하(전년 1.2°C, 금년–2.7°C)로 레미콘 품질확보(양생)를 위한 기간필요

- 레미콘(관급) 수급 업체인 우진레미콘(주)가 한파로 원자재 부족 및 년말 레미콘수요 증가로 동공사에 수요물량 공급이 되지 않음을 통보

Ⅲ		공사기간연장 검토

□ 근  거

- 공사계약 일반조건 제26조 계약기간의 연장

□ 용역기간 연장내용

구 분		당 초	변 경	비 고
공사기간	총차	‘16.12.30 ~’17.12.26	‘16.12.30~’18.01.12	증 17일
	2차	‘17.02.17 ~’17.12.26	‘17.02.17~’18.01.12	증 17일

□ 연기사유 귀책사유 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		처리의견

□ 동절기 전년대비 1일 평균기온 급강하(전년 1.2°C, 금년 -2.7°C)로  외부토목공사 콘크리트 습식작업 동해 피해 방지를 위한 조치 필요

□ 레미콘(관급) 납품이 지연되어 예정대로 공사 진행할 수 없으므로 공기연장이 필요함

붙임 : 공사기간 연장요청 공문 및 수정공정표 1부.  끝.