문서번호	정보자원운영과-7178
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
박종순		代류은희	12/21 代김안철
협 조
	기획관리과장			김안철
	인터넷통신과장			황기원
	주무관			류은희

클라우드 서비스 확대적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축

부분 검사(수) 계획

2017. 12.

데이터센터

[정보자원운영과]

- 클라우드 서비스 확대적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축 -

부분 검사(수) 계획

「클라우드 서비스 확대적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축」 사업의 일부 H/W 및 S/W가 설치 완료됨에 따라 물품의 부분 검사(수)를 다음과 같이 수행하고자 함.

1	사업 근거

□『클라우드 서비스 확대 적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축』(국장방침, ’17.3.15)

□『검사(검수)요청-클라우드 서비스 확대적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전.구축(물품)』(기획관리과-11845, 2017.12.19.)

2	사업 개요

□ 사 업 명 : 클라우드 서비스 확대 적용을 위한 클라우드센터 2단계 이전·구축

□ 사업기간 : ************************************

□ 사 업 비 : ***********************************

□ 사 업 자 :********

□ 부분검사금액 : *********************************

□ 부분 검사(수) 대상

❍ 하드웨어(H/W) : 총 37식

- 서버(13식), 스토리지 증설(4식), SAN스위치 증설(2식), 백업장비증설(2식), 백업장비(1식), 스위치(3식), 보안장비(5식), 기타(7식)

❍ 소프트웨어(S/W) : 총20본

- OS(12본), 가상화 S/W (4본), 스토리지 S/W(1본), 백업 S/W(1본), 서버취약점관리(1본), FMS(1본)

❍ 기타  : 총 2건(면진설비 및 내부이전)

□ 부분검사대상 세부내역 : 총59식 (상세내용은 붙임#1)

❍ 하드웨어(H/W) : 총 37식

구분		수량	제품명	비고
서버	UNIX	6식	HP c7000, HP BL870c i4	UNIX 통합서버
	x86	6식	이슬림 SU7-2212G	가상화 서버
		1식	MK119서버(HP DL360)	시설물관리시스템 운영서버
스토리지		1식	EMC VMAX3 디스크	통합스토리지 디스크 증설
		3식	EMC VNX5800 디스크	가상화스토리지 디스크 증설 추가제안(NAS 디스크 증설)
		2식	SAN 스위치 모듈	SAN 스위치 포트 증설
백업장비		2식	IBM TS1060 LTO6드라이브	드라이브 증설
		1식	Veritas NetBackup Appliance 5240 (VTL)	민원행정 백업
스위치		3식	L3 스위치	시스템운영, 행정망
보안		3식	방화벽	관리영역, 행정망
		2식	VPN	대외연결용
기타장비		1식	ATEN KVM 스위치
		1식	USB 키퍼(500개)
		1식	삼성프린터 토너
추가제안		1식	EMV VNX5800 디스크
		3식	이동식 KVM 선반

❍ 소프트웨어(S/W) : 총 20본

구분	수량	제품명	비고
운영체제(OS)	6본	MS Windows Server	시범환경(2), 기타 S/W(3), FMS운영서버(1)
	6본	RedHat Linux	가상화 통합서버(4) 가상화 시범환경(2)
가상화 S/W	4본	VMWARE vSphere	가상화 통합서버(4)
스토리지 S/W	1본	EMC SRDF	통합스토리지 원격복제 S/W
백업 S/W	1본	Veritas NetBackup	LTO Drive S/W, SAN 백업 S/W O/S 이미지 백업용 S/W
서버취약점 관리시스템	1본	Secuquard SSE Secuguard UVM	서버취약점 분석도구 통합 취약점 이력관리시스템
시설물관리시스템	1본	MK119	FMS

❍ 기타 : 총 2건

구분	작업 명	비고
장비 이전/이관	면진설비에 따른 전산장비 재배치
공사	면진설비 구축

최종(2차) 검사(수) 대상

하드웨어(H/W) : 총 2식

구분		수량	제품명	비고
서버	UNIX	2식	HP rx2800	DR 운영서버

소프트웨어(S/W) : 총 1본

구분	수량	제품명	비고
통합관제시스템	1본	Open Manager	기능 보강

기타 : 총 5건

구분	작업 명	비고
기능 보강	클라우드 관리포털 및 시범구축 가상화
장비 이전/이관	상수도사업본부 시스템 이전 및 이관
	클라우드센터3단계 이전/이관 현행화
	DB 자료 이관
재해복구시스템 구축	상수도사업본부 재해복구시스템 구축

3	검사(수) 계획

□ 검사(수) 일정

❍ 검사(수)기간 : 검수요청일(2017.12.19)로부터 14일이내

❍ 검사(수)자 : 총 8명

- 검사(수)총괄 : 정보자원운영과장 김기항

- 검사(수)참여자

· 기획관리과     : ***

· 정보자원운영과 : *************

· 인터넷통신과   : *************

□ 검사(수) 방법

❍ 납품된 장비의 물리적인 수량 검사

❍ 납품 규격의 적합성 확인을 위한 규격 검사

❍ 설치 상태 및 정상 운용 확인을 위한 기능 검사

❍ 제반 S/W 정품 확인을 위한 라이선스 검사

□ 검사(수) 내용

❍ 검수목록

❍ 검수 점검표

❍ 성과물 및 제출서류 확인

4	향후 계획

□ 부분 검사(수) 결과 보고 : 2017. 12. 26

□ 최종 검사(수)실시       : 2018. 2월

*****************************************************

□ 사업완료보고회          : 2018. 2월

□ 시스템 안정화           : 2018. 3. 1 ~ 4. 30

붙임 : 1. 검사(수) 및 성과품 목록 1부.

2. 검사(수) 점검표 1부.