문서번호	총무과-44794
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	박동규	12/21 정상택

2017년도 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 적용단가 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

행 정 국

(총 무 과)

2017년도 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 적용단가 검토보고

2017년도 전기시설물 유지보수공사(연간단가)를 시행함에 따라 설계   변경시에 적용하는 단가에 대한 합의내용을 검토하여 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년도 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : ’17.02.14 ~ ’17.12.31

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : ******************

□ 검토내용

○ 검토사항

- 검토사유 : 청사 시설물 유지보수공사 시행 중에 발생한 계약물량의 증감 및 신규비목에 대한 적용단가 검토

- 검토내용 : 계약물량의 증감 및 신규비목에 대한 적용단가

○ 검토내용

	<계약물량 증감 및 신규비목 관련 규정>
▶규정 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부 예규 제88호, ‘17.4.11) 공사계약 일반조건 - 제7절 계약금액의 조정(발주기관의 요구) → 물량감소 : 감소된 공사량의 단가는 계약단가 적용 → 물량증가 및 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 협의하여 결정

- 물량감소 부분의 단가는 계약단가를 적용

- 물량증가 부분은 소량이며 조달 단가로서 계약단가와 비교하여도   차이가 없으므로 업체와 협의하여 계약단가를 적용

- 신규비목은 설계변경 당시를 기준으로 선정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 적용

- 비교단가(2개소 이상)를 활용하여 단가를 산정

□ 합의결과 내용

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행자부 예규 제88호, ‘17.4.11) 공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정(발주자의 요구)에 따라

- 물량감소 및 증가되는 공사량의 단가는 계약단가 적용

- 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 적용(2개소 이상의 비교단가 활용)

□ 조치사항

○ 협의된 내용을 금회 설계변경시에 단가산정에 적용하고자 함

□ 향후일정

○ 설계변경 계약	’17. 12. 21.(목)

○ 준공	정산(3차)	’17. 12. 22.(금)

붙임 : 설계변경 적용단가 합의서 1부.   끝.