문서번호	시설보수과-11025
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	12/21 배광환
협조
	주무관		김종성

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

기성(총차6회, 2차2회) 검토 보고

2017. 12

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

기성(총차6회, 2차2회) 검토 보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 「사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)」와 관련하여 건설사업관리 용역사로부터 공사부분 기성검사(제6회) 결과 제출에 따른 검토 보고임. ※ 관련근거:공사기성(6회) 기성검사 결과제출(한국건설관리공사 토목0531-3188(‘17.12.20))

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

○ 공사기간 : 2016.4.12.~2018.5.30. (2차:‘17.8.1~‘18.5.30)

○ 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

○ 계약금액 : 3,661,900천원 (2차:1,897,900천원)

○ 공사규모 : 교량확장 폭30m→37m, 연장 90m

성능개선 폭 10m, 연장 90m, DB18→DB24

○ 건설사업관리단 : 한국건설관리공사 / ㈜대한콘설탄트

□ 주요 추진사항

○ 2016. 4월~10월 : 확장부 하부 기초구조물 시공 완료

○ 2016. 11월~2017. 3월 : 확장부 하부구조물(교각 등) 시공완료

○ 2017. 4월~7월 : 확장부 빔 거치 및 슬래브 타설 완료

○ 2017. 8월~12월 : 성능개선부 철거, 거더설치 및 슬래브 시공중

□ 기성(총차6회, 2차2회) 검토 보고

○ 전회까지 기성액 : 2,288,700천원(62.5%)

○ 금회 기성액 : 719,400천원(19.6%)

○ 누계 기성액 : 3,008,100천원(82.1%)

○ 주요 반영내용

- 확장공사 : 교량배수시설, 아스콘포장, 경계석/보도부포장, 조경공사 정산 등

- 성능개선 : 기존교량 철거, 가밴트 설치,기존교량 하부공, 콘크리트 보수 정산, 안전시설물 등

□ 공사비 집행 현황

(단위:천원)

구 분	계약금액	전회까지 기성액	금회 기성액	기성잔액 (사고이월)
계(총차)	3,661,900	2,288,700	719,400	653,800
1차공사	1,764,000	1,764,000	-	-
2차공사	1,897,900	524,700	719,400	653,800
집 행 율	100%	62.5%	19.6%	17.9%

※ 금회 기성액 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 사천교확장, 시설비(102,469천원)

- 교량안전과, 일반교량관리, 사천교 성능개선, 시설비(616,931천원)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리단으로부터 제출된 공사 기성부분 검사(총차6회,2차2회) 결과에 대하여 현장 시공 확정분 기성 반영내역과 관련 준공도서 등을 확인한 결과,

○ 2차공사 계약물량 중 철거 및 슬래브 등 시공부분에 대한 공사비 반영 및 정산이 적정한 것으로 판단되므로 기성부분 준공 처리코자 함.

붙임 : 1. 기성검사 결과보고(감리단) 1부.

2. 기성내역서(총차6회) 1부.  끝.