아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신정 도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가 고시

1. 신정도시개발사업과 관련, 주택도시공사가 양천구를 경유하여 신청한 신정 도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가에 대하여 검토한 바, 임대주택 공급 확대를 위한 변경 및 사업시행 기간 만료에 따른 기간연장 등을 반영하기 위하여 ,

2. 「도시개발법」 제4조, 제17조에 의거 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가하고, 같은 법 제9조, 제18조에 의거 이를 고시하고자 합니다.

가. 개발계획 변경사항

구 분		기정	변경	변경사유
토지이용계획	도로	4,374	4,386	가각 조정에 따른 면적변경
	공공공지	195	183
사업시행자		서울특별시 SH공사 사장 이종수	서울특별시 주택도시공사 사장직무대행 신범수	시행자 사명 및 대표변경
사 업 기 간		실시계획인가일~환지 처분일(2017. 12월)	실시계획인가일~환지처분일(2019.12.31.)	토지소유자 공동주택사업 지연에 따른 후속사업 순연
주 택 공 급		총437호 (분양 355호, 임대 82호)	총476호 (분양 356호, 임대 120호)	임대주택 공급 확대에 따른 변경

나. 실시계획 변경사항

구 분	기정	변경	변경사유
사 업 비	15,417,624천원	10,457,090천원	주민이주비 및 폐기물 처리비 감소
건 폐 율	20% 이하	40% 이하	공공임대주택(B-2) 확대에 따른 획지계획(건폐율) 변경

붙임 : 1. 도시개발구역 사업시행기간 연장 검토보고 1부.

2. 고시문(안) 1부.  끝.

주무관	정종우		도시개발팀장	강창호		도시활성화과장	12/21 한병용
협조자
시행	도시활성화과-14673	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관 2동2층 시설계획과	/
전화		/전송		/	asaravo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)