문서번호	정수시설과-5018
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이극희		김석정	12/22 신동호
협 조
	주무관			최양교

2017 기계설비 보수공사(연간단가)

2차 설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

정수시설과

2017 기계설비 보수공사(연간단가)

2차 설계변경 시행 보고

우리 정수센터 기계설비의 안정적인 유지보수를 위한 기계장치 등 보수공사(연간단가) 시행 중 3,4차 작업지시 물량 증·감 및 내역 변경이 발생하였기에 아래와 같이 설계변경 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공사개요

◯ 공사명 : 2017년 뚝도아리수정수센터 기계설비 유지보수공사(연간단가)

◯ 계약기간 : 2017. 4. 19 ~ 2018. 3. 31

◯ 계약금액 : 금190,211,148원

◯ 계 약 자 : (주)덕산에너지 대표 강복중

◯ 공사계약 공종

- 응집제 약품 이송배관 개선

- 슬러지수집기 부품 교체

- 노후 구내용수 배관 교체

- 정수지 유출밸브 샘플링 배관 개선

- 노후 원․ 취수 샘플링 배관 개선

- 기타 고장시 기계장치 보수

- 각종 기기류 도장

□ 작업 지시 현황

◯ 3차 작업지시

- 작업 기간 : 2017. 9. 12 ~ 10. 13

- 공 종 : 관리동 지하 집수정 펌프설비 교체외 4건

◯ 4차 작업지시

- 작업 기간 : 2017. 11. 20 ~ 12. 8

- 공 종 : 옥외 배수관 교체 및 약품배관 지지대 보강외 2건

※ 세부 작업지시내용은 첨부 작업지시서 참조

Ⅱ		설계변경 사항

□ 관련 근거

○ 취,정수장 기계설비 점검결과 및 기계설비 연간단가 작업지시계획(3차) 보고   : 정수시설과-3587(2017. 9. 12)

○ 취,정수장 기계설비 점검결과 및 기계설비 연간단가 작업지시계획(4차) 보고   : 정수시설과-4692(2017. 11. 30)

□ 주요 변경 내역

○ 작업 지시내역의 현장 시공에 따른 실물량 가감 정산

○ 예상치 못한 기계고장으로 인한 신규 공종 발생

※정수과, 수리반 점검시 고장설비 우선 보수 요청 사항

- 관리동 지하 집수정 펌프설비 교체(3차-1호)

- 배출수지 슬러지이송배관 세척수 라인 설치(3차-2호)

- 송수관로 집수정 배관 개선(3차-3호)

- 취수장 스트레이너 및 배관 설치(3차-4호)

- 취수장 스크린 세척용수 바이패스 배관 설치(3차-5호)

- 옥외 배수관 교체 및 약품배관 지지대 보강(4차-1호)

- 취수장 스크린 세척용수 노후밸브 교체(4차-2호)

- 노후 상수 배관 확대 개선(4차-3호)

□ 총괄변경 내용

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 세부 물량 및 금액변경사항 : 첨부 내역서 참조

○ 변경내역

구 분	계약 금액	1차 기성	2차 기성(금회)	비 고
공급가액	172,919,225	54,130,000	49,930,000	3,4차 작업지시 정산
부가가치세	17,291,923	5,413,000	4,993,000
도급금액	190,211,148	59,543,000	54,923,000
결정금액	190,211,148	59,543,000	54,923,000	잔액 75,745,148

Ⅲ		조치계획

□ 당초 발주설계시 예상치 못한 신규 보수 공종 및 기계고장 내역, 시공물량 가감에 따른 정산으로 설계내역을 변경 ․ 조정하여 3,4차 작업지시 내역을 정산 처리코자 함.

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자  하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함.

□ 심의결과에 의거 정산 및 대가(2회 기성집행)지급 하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 원가관리 검증내역서 1부.

2. 작업지시서(3차,4차) 각 1부.   끝.