＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2017년 노량진배수지외 7개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역)

우리사업소에서 시행중인 『2017년 노량진배수지외 7개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역』에 대하여 설계변경 사전심의를 마치고 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 영 명 : 2017년 노량진배수지외 7개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

나. 계 약 자 : ㈜한국시설안전연구원 대표 안평기

㈜한국국토안전연구원 대표 신광식

다. 용역기간 : 2017.04.14. ~ 2017.12.31.

라. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(가압장․배수지등 시설물 유지관리)

마. 설계변경사유 : 자문비 반영에 따른 계약금액 변경

바. 변경내역                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총 공 사 비	145,980,000	146,310,000	증)330,000
공 급 가 액	132,709,091	133,009,091	증)300,000
부 가 세	13,270,909	13,300,909	증)30,000

붙임  설계변경 보고서 및 내역서 1부.

2. 변경합의서 및 심의의결서 각 1부. 끝.

주무관	강판오		주무관	代강판오		시설관리과장	代권승계		남부수도사업소장	12/22 전영석
협조자	주무관	심숭금		행정지원과장	代신민철
시행	시설관리과-35277	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/	kpo8585@seoul.go.kr	/	부분공개(7)