문서번호	건축부-22150
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
양수지		차무흥	12/22 代김충범
협조

시립노원청소년 직업체험센터 신축공사

대지경계측량실시 실정보고 승인

2017. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

시립노원청소년직업체험센터 신축공사

대지경계측량실시 실정보고 승인

시립노원청소년직업체험센터 신축공사와 관련, 대지경계측량실시에 대하여 검토 결과 승인코자 함.

□ 공사개요

○ 위    치 : 노원구 하계동 224-9외 3(혜성여고 인접 부지)

○ 규    모 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,299.76㎡

○ 시공사/감리사 : ㈜디에스종합건설/㈜신한종합건축사사무소

○ 공사기간 : ’17.11.17 ~ ’19. 3.16

○ 공 사 비 : ****

□ 설계변경 검토내용

○ 검토사유

- 시립노원청소년직업체험센터 신축공사중 인접대지와의 대지경계측량실시와 관련하여 감리자 실정보고가 접수되어 그 적정성에 대하여 검토함.

○ 관련근거

- 공사계약일반조건 제19조(설계변경)

- 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제67조(설계변경)

- 서울특별시 도시기반시설본부 회의록(2017.11.20.)

○ 주요내용

- 대지경계측량 실시

▪시립노원청소년직업체험센터 신축공사 부지의 경계복원측량 실시에 대한 내역서 미반영으로 공사비 재산정

□ 검토의견

○ 공사비 검토(증 3,373,700원)

(원)

공 종 명		당 초	변 경	증・감
직접 공사비	공통가설공사(경계복원측량비)	*	*********	**********
	소계	*	*********	**********
부가가세		*	*******	********
총공사비		*************	*************	**********

○ 적용단가 검토

- 한국국토정보공사 경계측량비 전자세금 계산서(2017.11.29.)

□ 조치의견

○ 건설사업관리단이 제출한 “대지경계복원측량 실시” 에 대한 실정보고 내용이 적합하므로 승인하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

붙임 : 경계복원측량 실정보고(건) 1부.  끝.