서울속으로 한발더, 시민곁으로 한뼘더
	서울특별시의회
수신	의 정 담 당 관
(경유)
제목	준공검사(감독)조서 제출 및 지연배상금 부과 요청(IoT 기반의 초연결사회 보안문제 연구)

1. 의정담당관-14148(2017.12.12.)호와 관련하여, 2017년도 서울특별시의회 입법정책 연구용역 ‘교육자치와 지방자치의 협력지원제도 개선방안 연구’에 대한 준공검사(감독)조서를 붙임과 같이 제출합니다.

2. 아울러, 계약업체가 계약기간을 미준수하여 아래와 같이 지연배상금을 부과(상계처리)하고자 하오니 협조하여 주시기바랍니다.

가. 계약건명 : IoT 기반의 초연결사회 보안문제 연구

나. 계약금액 : 금23,200,000원(금이천삼백이십만원)

다. 계약업체 : 주식회사 아큐랩(대표 김태연)

라. 계약기간 : 2017. 8.24.~12.10.

마. 지연배상금 : 금331,760원(금삼십삼만일천칠백육십원)

- 산출내역 : 계약금액(23,200,000원)×지체일수(11일)×지연배상금률(1.3/1000)

- 지체내역

계약금액	준공기한	준공일자	검사일자	지체일수
23,200,000원	2017.12.10.(일)	2017.12.21.(목)	2017.12.22.(금)	11일

※ 준공기한을 지나서 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한에 다음날부터 준공검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입, 준공기한의 말일이 공휴일(토요일 포함)인 경우 준공기한이 다음날로 종료되고 지체일수는 그 종료일의 다음날부터 기산

붙임  1. 준공검사(감독)조서 1부.

2. 최종보고서 1부.

3. 지연배상금 합의서 1부.

4. 선금정산서 1부(별도송부).  끝.

	입법담당관
주무관	이수호		입법정책팀장	박남기		입법담당관	12/22 배선희
협조자
시행	입법담당관-3834	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://smc.seoul.kr
전화	02)3705-1170	/전송	02)3705-1486	/	ak1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)