힘이되는 평생친구, 보건복지부
		서울특별시
수신	은평구청장(장애인복지과장)
(경유)
제목	2016~17년도 장애인거주시설(은평재활원) 기능보강사업 계획변경 승인 통보

1. 은평구 장애인지원과-24568(2017.12.15.)호 및 장애인복지정책과-20421(2017.12.22.)호와 관련입니다.

2. 귀 자치구에서 신청한“2016~17년도 장애인거주시설(은평재활원) 기능보강사업 변경계획 승인 요청”건에 대하여 다음과 같이 변경 승인하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변경 승인 내역

○ 시 설 명 : 장애인거주시설(은평재활원)

○ 변경내역

1. 낙찰차액을 활용한 안전시설 확충 및 편의시설 추가설치 승인건

(단위 : 원)

사업명	구분	총계	사업비(단위:원)
			보조금계	국비	시비	자부담
은평 재활원 신축공사	당초금액	1,661,217,000	1,143,000,000	571,500,000	571,500,000	518,217,000
	낙찰금액	1,443,421,736	993,156,860	496,578,430	496,578,430	450,264,876
	변경내역	1,670,725,736	1,143,000,000	571,500,000	571,500,000	527,725,736
	증감내역	217,795,264	149,843,140	74,921,570	74,921,570	67,952,124

2. 공사기간 연장 승인건

사 업 명	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
은평재활원 신축공사	’17.5.30~’17.11.25	’17.5.30~’18.3.20	연휴 및 겨울철 혹한기 공사불가

3. 장비보강 내역변경 승인건

사업명	변경대상	당초사업비	변경사업비	증감내역	비고
은 평 재활원 장비보강	총계	173,047	-	-
	생활가전 외 7종	60,647	32,240	△28,407	냉난방기 설치비 감소
	생활가구 외 7종	44,778	73,185	28,407	붙박이장 내역 증가
	급식장비	36,506	-	-	변동없음
	물리치료	26,452	-	-	변동없음
	의무실	4,664	-	-	변동없음

나. 검토 의견 : 승인

- 2017 장애인복지시설 사업안내 지침에 따라 장애인거주시설(은평재활원) 기능보강사업 계획변경(낙찰차액 활용 및 공사기간 연장) 을 승인함.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김수진			주무관					조경일					장애인복지정책과장					12/22 代김홍찬
협조자
시행			장애인복지정책과-20423									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)															/
전화		02-2133-7455						/전송			02-2133-0722					/	kimsujin@seoul.go.kr												/	대시민공개