등록번호	청소행정과-40171		주무관		재활용관리팀장		청소행정과장		복지환경국장
등록일자	2017.12.22.
			전학배		代전학배		신선애		전결 12/22 代이수경
결재일자	2017.12.22.
공개구분	대시민공개
			협 조
2017년 하반기 재활용선별시설 운영 및 잔재폐기물 처리 위탁용역 감액 설계변경
복지환경국 청소행정과

2017년 하반기 재활용선별시설 운영 및

잔재폐기물 처리 위탁용역 감액 설계변경

2017년 하반기 재활용선별시설 및 잔재폐기물 처리 위탁용역 만료 시점이 도래함에 따라 최초 계약물량과 실제 처리 예정물량 간 차이를 반영하여 감액 설계변경하고자 함.

Ⅰ		위 탁 현 황

위탁업체	계약기간	주 소	계약물량	계약금액
월드EP무역	2017.7.1.~ 2017.12.31.	경기도 화성시 팔탄면 율암리 82-4	1,806톤	178,794,000원

Ⅱ		변 경 개 요

변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
처리물량	1,806톤	1,778.478톤	감 27.522톤
계약금액	178,794,000원	176,069,300원	감 2,724,700원

변경사유

- 최초 계약물량과 계약기간 만료시점 시 실제 처리 예정물량 간 차이가

발생함에 따라 그 차이를 반영하여 감액 설계변경

예산과목 : 청소행정과, 청소행정 강화, 자원의 절약과 재활용 촉진,

자원 재활용 관리, 민간이전, 민간위탁금

Ⅲ		향 후 계 획

월드EP무역과 감액 설계변경 계약 체결 후 2017년 12월분 잔재폐기물

처리비(기성금) 지급

첨   부 : 1. 단가산출내역서 1부.

2. 과업지시 및 단가계약 특수조건서 1부.  끝.