＂깨끗한 당신이 청렴 성북을 만듭니다＂
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2017년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가) 설계변경(제3회) 및 공사기간 연장 시행

우리구에서 시행중에 있는『2017년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 제2회 설계변경 및 공사기간 연장 시행을 시행하고자 합니다.

1. 공  사  명 : 2017년 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사(연간단가)

2. 계약상대자 : 건희건설(주)  대표 이정미

3. 공 사 기 간 : 2017. 3. 31. ~ 12. 31.

4. 설계변경내역

[단위 : 원]

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총공사비	1,497,000,000	1,721,000,000	증) 224,000,000
도 급 비	796,816,000	1,173,579,000	증) 376,763,000
관 급 비	324,264,600	325,266,540	증) 1,001,940
이 전 비	375,919,400	222,154,460	감) 153,764,940

5. 설계변경사유

- 공사 시공 물량 증·감

6. 공사기간 연장

- 당초 : 2017. 3. 31 ~ 2017. 12. 31

- 변경 : 2017. 3. 31 ~ 2018. 3. 31

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리,

구 소규모 편익시설(도로) 설치공사, 시설비및부대비, 시설비(구비-1,370백원)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리,

과속방지턱 설치 및 도색공사, 시설비및부대비, 시설비(구비-100백원)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리,

제설대책 추진, 시설비 및 부대비, 시설비(구비-151백만원)

- 문화체육과, 문화예술진흥 및 문화유산보존전승, 관광산업 진흥, 문화유산

발굴 홍보, 시설비및부대비, 시설비(구비-100백만원)

붙  임 : 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 재비율 검증 확인서 1부.

4) 방침서 각 1부. 끝.

주무관	김용필		도로계획담당	이상문		도로과장	최광천		안전건설교통국장	12/22 代이상수
협조자	계약담당	이환규		재무과장	김영임
시행	도로과-24814	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 도로과	/
전화	02-2241-3542	/전송	02-920-2946	/	kypill00@sb.go.kr	/	대시민공개