문서번호	도로관리과-20627
결재일자	2017.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	12/21 배광환
협조
	주무관		최현

동공탐사용역 공정회의(11월) 결과 보고

2017. 12.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 공정회의(11월) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’17.12.12(화) 17:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 2017년 2단계, 3단계 월간보고

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로굴착관리팀장, 업무담당 1명

(업체) 지케이엔지니어링(17-2), 광성지엠(17-3)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’17.11.30 기준)

구분	계획연장	탐사연장	분석연장	분석동공	제척(GPR)	천공	동공발견	적중률 (미달포함)
계	1,994㎞	1,790㎞	1,677㎞	1,482	296	1,156	962	83.2% (90.1%)
1단계	981㎞	981㎞	981㎞	794	129	665	546	82.1% (90.1%)
2단계	547㎞	547㎞	547㎞	377	35	342	286	83.6% (86.8%)
3단계	466㎞	262㎞	149㎞	311	132	149	130	87.2% (98.0%)

□ 공정회의 주요내용

○ 공통

- 천공작업시 천공수 처리 철저 등 동절기 현장관리 철저

- 보호차량 및 작업구간 간격 유지 및 신호수 별도 배치 실시

○ 2단계 추진실적 관련

- 천공작업 중 지하매설물 안전사고 발생 예방 철저

- 동공파형 분석기법 연구는 세종대에서 추진하고 있는 연구와 유사점이 있으므로 기술교류 실시할 것

○ 3단계 착수보고 관련

- 1월초까지 천공작업 마무리 할 것

- 굴착복구 구간 동공탐사 일정 수립 제출할 것

- 동절기에 시행하는 흙의 유실속도 시험은 지반이 얼어 있을수 있으므로 해당 교수와 협의하여 시행할 것

별도 : 보고자료 2건(출력물).  끝.