문서번호	정수과-14034
결재일자	2017.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
안기열		전결 12/21 최철웅
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

[1염소실 고형가성소다물질 폐기처리용역]

2017. 12.

영등포아리수정수센터

(정수과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터 1정수장 염소 제독용 가성소다 물질 폐기 처리 용역 시행 중 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의의결내용에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

□ 정비현황

○ 용 역 명 : 1염소실 고형가성소다물질 폐기처리 용역

○ 용역개요

- 계약금액 : 금2,612,500원

- 공사기간 : ‘17.11.21 ~ 준공일 ’17.12.27 예정

- 계 약 자 : 에스지개발(주) 대표 윤석환

□ 심의위원회 심의결과

○ 위 원 장 : 정수과장

○ 위    원 : 공업6급 김경진 외 3명, 간사 1명

○ 일    시 : 2017.12.21(목) 10:30 ~ 11:00(2층 사무실)

○ 안     건 : 1염소실 고형가성소다물질 폐기처리용역 설계금액변경 등

- 변경금액 : 1,812,250원

○ 심의결과 : 적정함

□ 심의위원회 심의내용

○ 시공물량 감소에 대한 적정성 검토

- 폐기물처리비 물량 정산 적정성 검토

․변경금액(폐기물 발생 물량 × 견적단가)으로 산출 적용하여 제경비는 변경없음

○ 설계변경 내역

품 명	규격	단위	수 량		단 가	산 출 가 격
			당초	변경		당 초	변 경
폐기물처리	톤	톤	2	1.47	750,000	1,500,000	1,102,500
공드럼	EA	개	20	9	30,000	600,000	270,000
운반비	회	회	1	1	275,000	275,000	275,000
계					-	2,375,000	1,647,500
부 가 세					-	237,500	164,750
총 계					-	2,612,500	1,812,250

□ 조치의견

○ 위와 같이 폐기물 물량 감소로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라

설계변경하고자 합니다.

따로붙임 : 심의위원회 의견서 등 1부. 끝.