문서번호	교통운영과-24624
결재일자	2017.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
이귀섭		구봉서	12/21 강진동
협 조

	2017년 교통신호기 신설·개량·유지보수공사 감리용역(북부,성동권) 설계변경 검토 보고

2017. 12.

교통운영과

(신호시설팀)

2017년 교통신호기 신설·개량·유지보수공사 감리용역(북부,성동권)

설계변경 검토 보고

2017년 교통신호기 신설·개량·유지보수공사(북부, 성동권) 감리용역 중 추가업무(감리)요청에 따라 감리용역의 설계변경를  시행코자 아래와 같이 보고합니다.

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 2017년 교통신호기 신설·개량·유지보수공사 감리용역(북부, 성동권)

❍ 용역기간 : 2017.05.02.~2017.12.29.

❍ 계약금액 : 금206,900,000원

❍ 계약업체 : 대영유비택(주) 대표 조근환

□ 설계변경 검토

❍ 용역금액 변경

[단위 : 원]

구분	변 경 내 역			비고
	당초	변경	증·감
총용역비	206,900.000	221,200,000	증)5,300,000
공급가액	186,445,000	191,229,091	증)4,784,091
손해배상공제료	1,608,000	1680,000	증)34,000
부가가치세	18,372,000	29,290,909	증)5,500,000

❍ 설계변경 사유

- 전력기술용역대가 기준 제15조 (대가 등의 조정)4항 발주자의 요구에     의한 업무변경에 있는 경우

· 천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치 감리계획보고

(교통운영과-17858(2017. 9.14)

- 2017년 교통신호기 신설·개량·유지보수공사 감리용역 계약변경 요청

[(대영17-12-23호(2017.12.19.))

❍ 공사물량 변경 내역

[단위 : 원]

사업소명	공사내역	공사금액			비고
		당초	변경	증감
합 계		3,240,000,000	3,372,000,000	132,000,000
북부도로사업소	교통신호기공사 1식	1,800,000,000	1,800,000,000	-
성동도로사업소	교통신호기공사 1식	1,440,000,000	1,440,000,000	-
추가 공사물량	천호대로버스전용차로전기공사	-	132,000,000	132,000,000

□ 조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행하고자 하며, 추가 소요되는 금액은 감리비 집행잔액을 사용하고자 함

- 예산과목 : 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기신설 및 보수, 시설비 및 시설부대비, 감리비(401-02)

□ 향후 추진일정

❍ 재무과로 설계변경 계약 의뢰

❍ 변경계약 후 용역 준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 발주자의 요구에 의한 업무변경 공문 사본 1부.  끝.