문서번호	주거재생과-15379
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생총괄팀장	주거재생과장
이연화		代이연화	12/21 국승열
협조	재생기반팀장		이남숙
	실무사무관		임근호

도시재생 홍보전시관 및 공동상설판매장 등 기본계획 용역 변경 계획

2017. 12.

도시재생본부

(주거재생과)

도시재생 홍보전시관 및 공동상설판매장 등

기본계획 용역 변경 계획

市 ‘서울형 도시재생’과 관련하여 전시·홍보·소통·판매·교육․축제 등을 아우르는 가칭 ‘도시재생 토털캠퍼스’의 장소를 ‘세운상가’에서 ‘돈의문’으로 변경하게 됨에 따라 기본계획 용역을 변경하고자 함.

Ⅰ	용역 개요

□ 용 역 명 : 도시재생 홍보전시관 및 공동상설판매장 등 기본계획

□ 계약기간 : ‘17. 11. 3 ~ ’18. 1. 4

□ 소요예산 : 금 44,000천원

□ 계약방법 : 수의계약

※ 관련법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조1항5호 마목에 따른 여성기업으로 추정가격이 5,000만원 이하이며, 연내 조속한 용역추진을 위해 수의계약 추진

*********************

Ⅱ	추진경위

□ ‘17. 10. 20 : 도시재생캠퍼스 조성 운영계획 수립

□ ‘17. 10. 24 : 도시재생 홍보전시관 및 공동상설판매장

기본계획 용역 의뢰

□ ‘17. 11.  3 : 용역계약 체결

□ ‘17. 12.  1 : 도시재생 홍보전시관 및 공동상설판매장 용역 1차 중간보고

□ ‘17. 12. 19 : 도시재생 홍보전시관 및 공동상설판매장 용역 2차 중간보고

Ⅲ	용역 변경 계획

□ 과업기간 연장

당 초	변 경	비 고
*********************	**********************

□ 대상장소 변경

당 초	변 경	비 고
*********	**********

*********

*****************************************************************************

****************************************************************

□ 귀책 사유 : 계약대상자 귀책사유 없음

□ 지체 상금 : 미부과

Ⅳ	향후 계획

□ ‘17. 12. 22 : 계약변 경의(재무과)

□ ‘18.   1.  4 : 용역 3차 중간보고

□ ‘18.   1. 22 : 용역준공

붙임 :1. 합의각서 1부.

2. 과업내역서(변경) 1부.