“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰(2017 교량 수중구조물 점검(청소) 용역)

우리과에서 시행중인 “2017 교량 수중구조물 점검(청소) 용역”과 관련 아래와 같이 설계변경(최종) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 2017 교량 수중구조물 점검(청소) 용역

2. 용역업체 : ㈜경성해양개발 대표 유우준

3. 용역비 내역

구 분	변 경 사 항			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
용 역 비	400,493,000원	381,380,000원	(감)19,113,000원

4. 변경사유

- 현장여건 변동으로 물량 증·감에 따른 용역비 변경

5. 예산과목 : 안전총괄본부 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 한강교량수중구조물 상시점검, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 방침서 1부.    끝.

	교량안전과장
주무관	김대희		기술점검팀장	代김대희		교량안전과장	12/21 한유석
협조자
시행	교량안전과-23264	(		)	접수		(		)
우	04524		/
전화	02-2133-8078	/전송	02-2133-0763	/	kdhlife@seoul.go.kr	/	대시민공개