세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 계약의뢰(2017년 종로,성북구관내 포장도로 굴착복구공사, 4차)

1. 우리 사업소에서 시행중인 『2017년 종로,성북구 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가      계약)』건에 대하여 아래와 같이 설계변경(4차) 및 차수별 금액변경을 시행하고 계약의뢰      하오니 조치바랍니다.

가. 공사명 : 2017년 종로,성북구 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 도급자 : *************

다. 공사기간 : 2017.06.01 ~ 2017.12.31.(총부기기간:2017.6.1~2018.5.31.)

라. 설계변경 사유 : 계약물량 증,감

마. 계약금액 변경내역 : 변경없음

구 분	당 초 (원)	변 경 (원)	증,감액 (원)	증,감
총부기금액	*************	*************	*	총부기금액 변동없이 금차계약금액 감액
금회(1차) 부기금액	*************	*************	*************

바. 차수별 계약금액 변경사유 : 시공물량 증,감 및 신공종 발생 등으로 금차 계약금액         변경으로 인한 차수별 계약금액 변경(총부기금액은 변동없음)

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 개조공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

재난시스템구축,소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치 및 관리 소방용수시설                   설치및보수,시설비 및 부대비

첨 부: 설계변경 도서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	유명수		급수운영과장	12/21 유용일
협조자
시행	급수운영과-29468	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동 2가)	/
전화	02)3146-2204	/전송	02)3146-2239	/	yms1903@seoul.go.kr	/	부분공개(7)