문서번호	토목부-27014
결재일자	2017.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이상욱B		여용석	12/21 김영수
협조

설계용역 준공(정산)설계변경 검토보고

[예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계]

2017. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계용역 준공(정산)설계변경 검토보고

[예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계]

지반침하에 따라 긴급수행 중인 “예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계용역”의 준공(정산)설계변경을 검토보고 드림

1		관련근거

○ 다산이엔지 17-119호(2017.12.20.) 설계변경 요청

2		용역개요

○ 용 역 명 : 예장동 유스호스텔 앞 긴급지반보강 및 하수관개량 실시설계

○ 규    모 : 지반침하보강 및 하수관개량

○ 용역기간 : 2017.10.31. ~ 2017.12.22.

○ 용역금액 : 64,000,000원

○ 용 역 사 : ㈜다산이엔지

3		추진현황

○ ＇17. 7. 4. : 최초 지반침하 발생

○ ＇17. 7. 5. : 2차 지반침하 발생

○ ＇17. 7. 9. : 3차 지반침하 발생

○ ＇17. 7.20. : 합동 원인조사

(서울종합방재센터, 도로관리과, 중부공원녹지사업소, 중구청)

○ ＇17. 7.27. : 지반침하 원인분석 및 보강공법 검토 용역시행(서울종합방재센터)

○ ＇17. 8.16. : 예장동 유스호스텔 앞 긴급복구사업 추진계획(행정2부시장 방침 제186호)

○ ＇17. 9. 5. : 재난관리기금 운용심의위원회 결과 및 예산 재배정 통보

○ ＇17. 9.20. : 긴급복구공사 의뢰(서울종합방재센터 → 토목부)

○ ＇17. 9.27. : 실시설계용역 추진계획(토목부)

○ ＇17.10.31. : 용역착수

4		설계변경 내용

□ 설계변경 내용

○ 용역 과업완료에 따라 시추조사 실제시행분 정산 (6회→3회)

□ 용역금액 변경내역                                     (단위 : 원)

구 분	설 계 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
1.지반조사	22,815,348	11,407,674	11,407,674	시추조사 (6회→3회)
2.붕괴원인 및 보강공법제시	13,604,877	13,604,877	-
3.제경비	14,965,365	14,965,365	-
4.기술료	5,714,048	5,714,048	-
5.직접경비	1,360,488	1,360,488	-
소 계	58,460,000	47,051,818	11,130,000	단수정리
부가가치세	5,846,000	4,705,182	1,113,000
총 계	64,000,000	51,757,000	12,243,000
총용역비	64,000,000	51,757,000	12,243,000

5		조치계획

○ 설계용역 과업완료에 따라 시추조사 실제시행분 정산 변경계약 후 용역준공

붙  임 : 1. 설계사 요청공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.