기성부분검사(감독)조서【2017노면하부 동공탐사용역(3단계)】

문서번호	도로관리과-20631
수 신 자	재무과장
접수번호

결재	주무관	도로굴착관리팀장	도로관리과장
	엄태용	오석관	12/21 배광환

공사명	2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)
계약자	광성지엠㈜ 대표이사 한광수
계약금액	일금 육억칠천일백만원(금671,000,000원)				기성부분 준공금액		일금 삼억칠천만원정(￦370,000,000)
계약일자	2017 년 9 월 27 일				착공일자		2017 년 9 월 27 일
준공기한	2018 년 4 월 24 일				부분준공 일 자		2017 년 12 월 13 일
준공검사일자	2017 년 12 월 20 일				참고사항		선급금 지급 : 231,000,000원
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인 사항				해당없음
위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
2017 년 12 월 20 일
현장감독공무원		도로관리과	과	지방시설주사		직		성명	엄태용
검 사 자		도로관리과	과	지방시설사무관		직		성명	오석관		오석관
검 사 자		도로관리과	과	지방시설주사		직		성명	최현		최현
서울특별시(분임)재무관 귀하

기성부분 검사조서(제1회)

1. 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)

2. 계 약 자 : 광성지엠㈜ 대표이사 한광수

3. 계약금액 : 一金육억칠천일백만원(금671,000,000원)

4. 기성금액   ※ 추진기간 : 2017.9.27. ~ 12.13.

○ 금회기성(1회) : 一金삼억칠천만원정(￦370,000,000)

○ 누계기성 : 금370,000,000원

5. 세부내역

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	계 약 내 용		금회(1회) 기성내용		잔 여 내 용
			수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
1. 2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)
1) 직접인건비				216,545,840		130,024,860		86,520,980
1차탐사	차량형 GPR	km	465	16,027,150	283	9,754,160	182	6,272,990
1차탐사 GPR자료분석	해석 및 자료처리	km	465	192,055,690	283	116,885,500	182	75,170,190
보고서작성		km	465	8,463,000	186	3,385,200	279	5,077,800
2) 직접경비				1,291,125				1,291,125
성과품인쇄, data백업		식	1	1,291,125				1,291,125
3) 제 경 비	직접인건비의110%	식	1	228,913,124		137,375,073		91,538,051
4) 기 술 료	(직접인건비+제경비)×19.9%	식	1	87,403,193		52,452,301		34,950,892
5) 2차 조사비	천공 및 내시경조사	공	246	27,114,858	150	16,533,450	96	10,581,408
6) 동공내부 흙의 유실속도 실험		식	1	30,000,000				30,000,000
7) 유전율과 노면온도,함수비와의 상관성연구		식	1	10,000,000				10,000,000
8) 동공성장 모니터링 실험		식	1	10,000,000				10,000,000
9) 굴착복구구간 시험탐사실시		식	1	3,000,000				3,000,000
공급가액				610,000,000		336,363,636		273,636,364
10) 부가가치세		식	1	61,000,000		33,636,364		27,363,636
총 용역비				671,000,000		370,000,000		301,000,000

붙임 : 부분준공(제1회) 신청서 및 관련서류 1부.  끝.

	도로관리과장