문서번호	공간정보담당관-14388
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
최지혜		代오상준	12/26 박문재
협조

2017년 항공사진 DB구축 사업 주간업무(12월3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-3194				57,200천원

2017. 12.

공간정보담당관

2017년 항공사진 DB구축 용역 사업

주간업무(12월3주) 보고

사업명			2017년 항공사진 DB구축 용역
사업기간			‘17.7.24.~‘17.12.31.	담 당		공간정보담당관 최지혜
사업비			57,200천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박성원 차장
보고기간			‘17.12.18.~‘17.12.22.	전체공정율		계획 93.37% / 실시 93.37%
주요내용			1. 국토지리정보원 보안 처리 결과 검수 2. 준공처리 완료 3. 완료보고회 진행 및 완료보고 결과서 작성
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2017.12.18 ~ 2017.12.22)				차 주 계 획 (2017.12.25 ~ 2017.12.29)
사업관리	1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - 국토지리정보원 보안 작업 PC 철수 - 준공처리 진행 - 완료보고회 진행 및 완료보고 결과서 작성 - 산출물 정리				1. 사업관리 - 월간보고(12월) - DB구축 진행 상황 체크 (데이터 이관 관련) - 산출물 정리
DB구축	1. 국토지리정보원 보안심사 결과 처리 및 완료 - 보안처리 전⦁후 비교 작업에 대한 문서 작업 진행 - 보안처리용 PC 포맷 2. 국정원 보안심사 결과 확인 - 국토지리정보원 결과와 비교하여 작업 진행 - 보안처리 PC 철수(포맷 완료) 3. 데이터 이관 - 내부용 업무시스템 데이터 이관 : 원본 10Cm Tiff 원본 이관 진행중				1. 데이터 이관 준비 - 내부용 시스템 : 25Cm ECW, 25Cm Jpeg2000 - 시민서비용 데이터 : 25Cm Jpeg2000
산출물/ 별첨자료
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타