문서번호	정보통신보안담당관-25022
결재일자	2017.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정보통신기획팀장	정보통신보안담당관	정보기획관
신경철	권순복	代권순복	12/26 정헌재

2017년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

2017. 12.

정  보  기  획  관

[정보통신보안담당관]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2017년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업 완료보고

서민, 소외계층 등 시민이나 관광객 누구나 무료로 이용할 수 있는

무선인터넷 구축사업 완료에 따른 현장 설치상태, 장비기능, 과업지시서 등에 대한 검수를 실시한바, 이상없이 적합하게 설치되어 보고 함.

Ⅰ		관련근거

민선6기 60대 주요공약 (서울 전역 와이파이존 구축, 공공 무선인터넷 10,000개소 설치)

2017년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축설치계획(정보통신보안담당관-16191/’17. 8.16)

공공 무선인터넷(WiFi) 구축 시행 (정보통신보안담당관-17710/’17. 9.05)

Ⅱ		추 진 경 과

현장실사 및 작업계획 수립       :   ’17.09.30 ～ 10.25

장비, 공사자재 등 반입          :   ’17.10.10 ～ 10.20

자치구․이동통신사 망구성       :   ’17.10.10 ～ 11.10

장비 설치 및 시설공사           :   ’17.10.23 ～ 11.20

이동통신사 AP 설치 및 개통     :   ’17.11.13 ～ 12.20

AP 설치위치 좌표 조사          :   ’17.11.14 ～ 12.18

AP운영상태 점검 및 납품검사     :   ’17.12.20 ～ 12.26

Ⅲ		사 업 개 요

건     명 : 2017년 공공 무선인터넷(WiFi) 구축

계약금액 : **************

계약업체 : *****

사업기간 : 2016. 9. 29 ~ 12. 20

주요과업

공공무선인터넷 설치 – 1,138AP(서울시 520, 이통망 618)

- u-무선망 연계, 자치구 통신환경 고려한 무선 인프라 구성

- LAN 및 광케이블 포설, 전원공사, 통신함체 등 설치

- 이동통신사 자가망을 이용한 AP 설치

무선 보안(일반,보안)접속 확대 적용(서울시 구축분 520AP)

- 시청 청사 내에만 적용하던 무선 보안접속을 서울시 설치분 전체 적용

- 이통사에서 구축한 AP는 적용가능 여부 검토 후 추진

(당초)                     (변경)

Ⅲ		세부시설내역

설치수량  : 614지역 1,138AP

(단위 : 지역/AP)

계	서울시	***	****	**
1,138	520	329	289	-

※ 이동통신사에서 이동사망(비예산)을 이용한 설치수량은 제외

지역별 설치수량  : 614지역 1,138AP

(단위 : 지역/AP)

구분	계		서울시		이동통신사
	지역	AP 수	지역	AP 수	지역	AP 수
계	614	1,138	285	520	329	618
주요거리	211	360	96	120	115	240
전통시장	14	21	7	7	7	14
버스정거장	1	2	0	0	1	2
공 원	275	387	97	130	178	257
공공시설	112	361	84	256	28	105
문화․관광	1	7	1	7	0	0

※ 설치장소 : 붙임1 참조

시설내역

구분	품 명	규 격	단위	수량
통신 장비	액세스포인트(옥내용)	- 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), 보안 AP	EA	150
	액세스포인트(옥내용)	- 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), 내장형 AP	EA	148
	액세스포인트(옥외용)	- 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz). 외장형 AP - 방진/방우 IP/66/IP67	EA	160
	PoE스위치(48포트)	- Fixed 48-port 100/1000Base-T with POE capability - 4-port 1000Base-X uplink	EA	1
	산업용스위치 (8포트)	- 1000 Base-X 2포트, 10/100/1000 TX 8포트	EA	289
	ONT	- 4 port 10/100/1000BASE-TX, RJ45 제공	EA	71
	VPN	- Fixed I/O 4x10/100 이상, AP 망	EA	82
	L3스위치 (Type-1)	- 1U 어플라이언스 타입 - 24 port SFP or TX combo - 10G port 2 port	EA	1
	PIU	- 2-Port GE-PON (PX20U, IEEE 802.3ah)	EA	3
	무선 랜컨트롤러	-IEEE802.11a/b/g/n/acAP제어및관리기능 -인증규격:WPA,WPA2,EAP지원 -APLicense:1,000	식	1
	웹인증장치	-유무선웹포탈인증	개	1

구 분	품 명	규 격	단위	수량
시설 공사	금속비닐 가요전선관	방수 22mm	M	4,269
	금속비닐 가요전선관 콘넥타	방수 22mm	EA	1,404
	UTP 케이블(옥외용)	옥외용 CAT5e*4P	M	24,052
	광케이블(가공)	SM12C	M	2,860
	광케이블(지중)	SM12C(인력견인)	M	1,700
	전원케이블	F-CV 2.5mm*3C	M	1,770
	FDF	12CH	EA	25
	광점퍼코드(3M)	SC-LC(3M)	EA	516
	광점퍼코드(3M)	SC-SC(3M)	EA	84
	광점퍼코드(10M)	SC-LC(10M)	EA	3
	광점퍼코드(20M)	SC-LC(20M)	EA	10
	광케이블 성단	12코아 이하	코아	1,215
	광케이블 접속	12코아 이하	코아	1,821
	광접속함체	가공직결형, 24C	개소	1
	광케이블 시험	종합시험,OTDR 측정	코아	1,020
	광 피그테일	1m 광 피그테일	EA	1,215
	누전차단기	220V-단상(30AF이하)	EA	30
	전원콘센트	220V-노출(접지형)	EA	388
	RJ45	AMP	EA	1,996
	RJ45 캡	일반형	EA	1,996
	난연 CD 전선관	16mm	M	10,600
	광모듈	SFP 1.25G bps Mini-GBIC	EA	358
	광모듈(WDM)	SFP 1000BASE-X WDM용	EA	220
	액세스포인트(실내형)	802.11a/g/n 내장형 AP	EA	339
	옥외용함체	300mm*300mm*400mm	EA	30
	광분배기	1 : 2 분기(2WAY SPLITER)	EA	68
	POE 인젝터	- 802.3at(30W) , 10/100/1000 Mbps	EA	381
	엠블럼제작	엠블럼제작 - 벽면부착용 : 1000개 / 안내판용 : 1000개	식	1
	XY좌표추출 및 도면작성	엠블럼부착및도면작업 - 1200AP 엠블럼, 좌표추출, 도면 작성 1식	식	1

붙 임 : 1. AP 설치현황 1부.

2. AP 설치 및 운영상태 점검 1부.

3. 계약내역 1부.

4. 검수내역 1부.

5. 검수사진 1부.

6. 설치도면(별도붙임) 1부.

7. 준공도서(별도붙임) 1부.  끝.