문서번호	시설관리과-35371
결재일자	2017.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
한규수		권승계	12/26 代권승계
협조

설계변경 심의결과 및 변경 시행 보고

[2017년-2차 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

명에 의거「2017년-2차 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과에 의거 아래와 같이 차수별 설계변경 시행하고자 보고합니다.

2017. 12.   .

보고자: 지방시설주사보 한규수

□ 심의대상

◦ 공 사 명 : 2017년-2차 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)

◦ 공사내용 : D= 13 ~ 300㎜, L=618m

◦ 공사기간 : 2017. 12. 19. ~ 2018. 6. 30.

◦ 수 급 자 : ***************

◦ 도 급 비 : 변동 없음

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	349,680,400원	349,680,400원	-	변동 없음

□ 심의일시 및 장소

◦ 2017. 12. 26(화) 14:00,  2층 사무실

□ 심의내용

◦ 설계변경의 타당성

◦ 신규공종 단가 및 계약물량 증․감 적용 적정여부

- 계약물량 증.감 : 아스팔트 포장깨기(0.18㎥) 등 318개 공종

◦ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

◦ 부대공 적정 산정 검토

◦ 계약금액 조정 (설계변경) 등.

□ 심의결과

◦ 계약변경 타당

◦ 주요 공종 변경사항 타당

◦ 세부공종 조정내역 타당

◦ 제경비 적용 타당

□ 설계변경

◦ 위 공사 시행중 현장여건 변화에 따라 신규공종 및 계약물량 증․감 발생

- 계약물량 증.감 : 아스팔트 포장깨기(0.18㎥) 등 318개 공종

□ 설계변경 및 차수별 계약금액 변경

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	349,680,400원	349,680,400원	-	변동 없음
1차수	209,808,240원	0원	감209,808,240원
2차수	139,872,160원	349,680,400원	증209,808,240원

□ 조치의견

◦ 심사결과에 의거 설계변경 시행코자하며 공사준공에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 사전심의 요청서 및 의결서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.