함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행[전기설비 유지보수공사(총차,1차)]

우리 정수센터에서 시행중인 전기설비 유지보수공사(총차,1차)와 관련 설계변경 사유가 발생되어 다음과 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 전기설비 유지보수공사(장기계속공사)

나. 계약업체 : 서광전설 대표 김명욱

다. 공사기간

- 총차 : 2017. 6.13 ~ 2018. 3.31

- 1 차 : 2017. 6.13 ~ 2017.12.31

- 2 차 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 3.31

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총 차	66,349,140	66,349,140	-	내역변경
1 차	61,717,980	61,717,980	-	내역변경
2 차	4,631,160	4,631,160	-	2018.1.1시행예정

라. 계약금액(도급비)                                           단위 : 원

마. 변경사유 : 시공물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 심의 의견서 1부.

3. 설계변경 합의서(총차,1차) 각1부.

4. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	양묘식		주무관	박소현		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	12/26 이성락
협조자	행정관리과장	안창수
시행	정수시설과-11976	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5672	/전송	02-3146-5691	/	yms3@seoul.go.kr	/	부분공개(5)