투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	「서울혁신파크 1단계 조성공사」계약변경(총차,2차공사) 의뢰

우리본부가 시행중인 「서울혁신파크 1단계 조성공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차 및 2차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울혁신파크 1단계조성공사

나. 공사기간 : 2016.12.30. ~ 2018.01.12

다. 계약금액 : 10,899,130천원(2차:9,987,586천원)

라. 계 약 자 : ㈜씨스페이스건설/청도건설(주)

마. 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사금액	총차	10,899,130,000원	12,421,200,000원	(증)1,522,070천원
	2차	9,987,586,000원	11,509,656,000원	(증)1,522,070천원
계약기간	총차	2016.12.30 ~ 2018.01.12	좌 동	변경없음
	2차	2017.02.17 ~ 2018.01.12	좌 동	변경없음

바. 예산과목 : 서울혁신담당관, 사회문제해결을 위한 사회혁신의제발굴실행, 사회혁신기반조성 및 성과확산, 서울혁신파크조성,시설비

붙임 : 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 공사계약변경요청 1부

3) 변경내역서(총차 및 2차)각 1부

3) 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정호기		복지시설과장	조영수		건축부장	12/22 代김충범
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-22173	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	bluenight@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)