투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	폐기물처리용역(전체1회, 1차1회) 준공기한 연기 계약의뢰(밤고개로 확장공사 폐기물)

우리 부에서 체결한 “밤고개로 확장공사 건설폐기물 처리용역(전체1회, 1차1회) ”에 대한 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 밤고개로 확장공사 건설폐기물 처리용역

나. 용 역 비 : 금702,518,190원 (1차 : 금 153,821,000원)

다. 용역기간 : 전체2017.5.18. ~ 2018.12.30. (1차 : 2017.5.18. ~ 2017.12.31.)

라. 계 약 자 : 대흥에코<주>

마. 설계변경 현황(전체1회, 1차1회)

구 분	당 초	변 경	증 ․감
전체 (1회)	‘17.5.18. ~ 18.12.30.	‘17.5.18. ~ ‘18.12.30.	변경없음
1차 (2회)	‘17.5.18. ~ ‘17.12.31.	‘17.5.18. ~ ‘18.6.30.	증 181일

바. 설계변경 사유 : 선행공종인 시설공사(토목) 준공기한 연기에 기한 연장

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 및 설계변경 방침서 1부.

2. 공기연장 관련 서류 1부.  끝.

	토목부장
주무관	박현희		광역도로과장	代이한규		토목부장	12/22 김영수
협조자	주무관	박상철
시행	토목부-27153	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	hyunhee07@seoul.go.kr	/	부분공개(5)