문서번호	정수과-7071
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
임해기		서한호	12/22 이달영
협 조

2017년도 정수시설물 청소용역

결과 및 설계변경 검토 보고

2017. 12.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

2017년도 정수시설물 청소용역

결과 및 설계변경 검토 보고

2017년도 정수시설물 청소용역 추진결과를 보고하고, 이에 맞추어 설계변경을 시행하여 용역 준공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 2017년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

□ 용역기간 : 2017. 04. 05~12. 22.

□ 계약금액 : 금106,665천원

□ 용역업체 : 삼조건설주식회사[대표 - 정은영, 소재지 - 서울시 중랑구]

□ 설계청소 물량 및 횟수

○ 정수지 31,057㎡, 응집·침전지, 여과지 등 131,312㎡

○ 정수지, 활성탄지 각1회, 여과지 2회, 응집･침전지 2회 등

과업내용	공종별	시설현황			계획물량
		계	#1	#2	대상	횟수	물량
주벽청소	착수정	4지	2지	2지	4지	1회	3,086㎡
	응집·침전지	12지	6지	6지	12지	2회	94,612㎡
	여과지	22지	12지	10지	22지	2회	14,322㎡
	정수지	2지	1지	1지	2지	1회	31,057㎡
	배출수·배슬러지지	4지	4지	-	4지	1회	3,134㎡
	1차농축조	2지	1지	1지	1지	0.5회	1,481㎡
	2차농축조	2지	1지	1지	2지	1회	3,933㎡
	활성탄흡착지 주벽	16지	16지		16지	1회	6,928㎡
	분배수로	1개소		1개소	1개소	1회	3,816㎡
설치 및 철거	이송수펌프	6개소	6개소		6개소	2회	12개소
준설	슬러지	4지			4지	1회	32m3

□ 추진경과

○ 2017.02.22. : 2017년 청소용역 추진계획 방침

○ 2017.04.07. : 청소용역 계약 체결 통보(시청 재무과)

○ 2017.04.07. : 청소용역 시행

Ⅱ		추진실적

□ 기    간 : ‘17. 4. 15~11. 14.

□ 실    적 청소 166,374m2, 이송수 펌프 3개소(설치 운전 및 철거)

○ 내   역 : 정수지 31,057m2, 기타 135,317m2

○ 내   역

과업내용	공종별	시설현황			실적물량
		계	#1	#2	계획	실적	물량
주벽청소	착수정	4지	2지	2지	4지	4지	3,086㎡
	응집·침전지	12지	6지	6지	24지	24지	94,612㎡
	여과지	22지	12지	10지	44지	44지	14,322㎡
	활성탄흡착지 주벽	16지	16지		16지	19지	8,227㎡
	2정수장 분배수로	1개소		1개소	1개소	1개소	3,816㎡
	2정수장 정수거	1개소		1개소	-	1개소	1,257㎡
	정수지	4지	2지	2지	4지	4지	31,057㎡
	배출수지 및 배슬러지지	4지			4지	4지	3,102㎡
	농축조	4지			2지	2지	6,895㎡
이송수펌프	설치 운전 및 철거	6개소	6개소		6개소	3개소	3개소

□ 청소시행일

구 분	시 설 별	청소일자	비고
1정수장	착수정	4월 25일(2지), 26일(1지)
	응집·침전지	4월 15일(6지), 18일(5지), 19일(4지, 이) 4월 20일(1지, 이), 21일(2지, 이), 24일(3지) 9월 23일(3지), 10월 21일(4지), 28일(5지) 11월 01일(6지), 04일(1지), 11일(2지)	이 : 이송수펌프 설치운영 철거
	여과지	4월 16일(1, 2, 5, 7지), 26일(6, 9, 12지) 4월 27일(3, 4, 8, 10, 11지), 10월 23일(2, 10, 11, 12지) 10월 30일(3,4,6,7,9지), 11월 13일(1,5,8지)
2정수장	착수정	5월 2일(1, 2지)
	응집·침전지	5월 08일(1지), 09일(4지), 10일(3지) 5월 11일(6지), 12일(2지), 13일(5지) 8월 01일(1지), 02일(2지), 03일(3, 6지) 8월 04일(5지), 05일(4지)
	여과지	4월 28일(3·4·5·9지), 5월 04일(1·2·6·7·8·10지) 8월 01일(1,2,3지), 02일(4, 5, 7, 8, 9, 10지) 8월 03일(6지)
	통합수로 및 정수거	9월 12일	시설물보수에 따른 신규물량(정수거)
고 도	활성탄흡착지	5월 09일(1지), 10일(7, 12지), 11일(2, 11지) 5월 12일(10·16지), 13일(14지), 8월 23일(3, 8, 9지) 8월 30일(5, 13지), 9월 05일(4, 10지) 9월 06일(2, 6, 14, 15지)	시설물보수에 따른 재청소 실시 (2, 10, 14지)
정 수	정수지	8월 08일(1지), 8월 09일(2지), 11월 14일(3, 4지)
배출수	배출수지 및 배슬러지지	9월 05일(배출수 1,2지) 9월 06일(배슬러지 1, 2지)
	농축조	8월 23일(2-1지), 30일(1-1지)

Ⅲ		정산내역

□ 정산금액 : 100,279,330원

○ 업체 정산요청액 100,279,330원 중 상반기 기지급액 33,584,000원을 제외하고 지급

******☞ 금회 지급예정액  66,695,330원

□ 산출내역

○ 총 면적                                        : 166,374m2

○ 정수지 청소                                    :   31,057m2

○ 기타시설(착수정, 여과지, 응집·침전지, 활성탄지) 청소 : 135,317m2

************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		설계변경

□ 설계사유

○ 공종의 증감발생

- 제2정수장 시설물보수에 따른 정수거 면적 : 증 1,257m2

- 활성탄지 시설물보수에 따른 청소면적 : 3지, 증 1,299m2

- 설계시 1차 농축조 면적 정정 : 1,481 → 2,962m2

- 이송수 펌프 설치 횟수 감소 : 12 → 3회

○ 보험료 정산에 따른 경비 증감발생

□ 설계변경 내역

○ 용역금액 변경 : 106,665,000원 → 100,279,330원

구 분		당 초	변 경	변동사항	비 고
총용역비		106,665,000	100,279,330	감6,385,670원
도급액	공급가액	96,968,183	91,163,030	감5,805,153원
	부가세	9,696,817	9,116,300	감580,517원
	총 계	106,665,000	100,279,330	감6,385,670원

□ 설계변경심의회 개최결과

○ 일    시 : 2017. 12. 21(목)

○ 심의결과 : 원안가결

Ⅴ		행정사항

□ 물량 증감 및 보험료 정산에 따른 설계변경 요청 : 행정관리과

붙임 : 설계변경심의결과, 변경설계서, 합의서, 보험증빙서류, 추진실적 각1부.  끝.