투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	시설공사 (1차1회) 준공기한 연기 계약의뢰(밤고개로 확장공사)

우리 부에서 시행 중인 “밤고개로 확장공사” 에 대한 준공기한(전체 1회, 1차 1회) 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 밤고개로 확장공사(1차)

나. 규    모 : 도로확장 폭 6차로 →7, 8차로, 연장 1.85㎞

다. 용 역 비 : 금 9,248,426,900원 (1차 : 금1,725,194,000원)

라. 용역기간 : 2017.5.18. ~ 2018.12.30.(1차 : 2017.5.18. ~ 2017.12.31.)

마. 계 약 자 : 큰빛종합건설<주>

바. 설계변경 내역(전체, 1차)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
전체 (1회)	용역기간	‘17.5.18. ~ 18.12.30.	‘17.5.18. ~ ‘18.12.30.	변경없음
1차 (1회)	용역기간	‘17.5.18 ~ ‘17.12.31.	‘17.5.18. ~ ‘18.6.30.	증) 181일

사. 설계변경 사유 : 지장물 이설 지연, 보상 협의 지연

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서  및 설계변경 방침서 각 1부.

2. 공기연장 관련 서류 1부.   끝.

	토목부장
주무관	박현희		광역도로과장	代이한규		토목부장	12/22 김영수
협조자	주무관	박상철
시행	토목부-27151	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	hyunhee07@seoul.go.kr	/	부분공개(5)