함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	변경계약(사업장폐기물 처리용역) 및 3차수 계약 의뢰(수정)

1. 정수과-13935(2017.12.19.), 정수과-14134(2017.12.26.)호 및 용역계약체결통보서(계약번호20160*******01, 20161*******00)와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역에 대하여 2차년도(2017년) 차수별 물량 및 금액 변경에 따른 변경계약 및 3차년도 차수계약을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 사업장폐기물(무기성 정수오니)처리용역(장기계속계약)

나. 계 약 자 : 처리업체 : 유창테크 대표 오인석, ㈜신세계자원 대표 김장성

운반업체 : 진도산업(주) 대표 현진옥, ㈜우림플러스원 대표 김미경

다. 총용역 계약기간 : 2016. 6. 16 - 2018. 06. 15(2년)

라. 총용역 부기금액(운반비+처리비) : ￦953,019,830원

마. 차수별 물량 및 금액 변경내역서

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
총용역부기금액(원)		953,280,940 (28,000톤)	953,019,830 (28,000톤)	감)261,050
차수별	1차(2016)	206,237,120 (6,060톤)	206,237,120 (6,060톤)	기성
	2차(2017)	549,557,300 (16,140톤)	422,598,380 (12,419톤)	감)126,958,920 감)3,721톤
	3차(2018)	197,486,520 (5,800톤)	324,184,330 (9,521톤)	증)126,697,810 증)3,721톤

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

첨 부 : 1. 보고서 1부.

2. 변경계약 설계내역서 1부

3. 합의서  1부.  끝.

	정수과장
주무관	김선례		정수과장	12/26 代김경진
협조자
시행	정수과-14135	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개