문서번호	대기환경연구부-19035
결재일자	2017.12.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
전문관	시민생활연구팀장	대기환경연구부장
임성철	김익수	12/26 어수미
협 조

소음이동측정차량 측정 부품 납품 지연으로 인한 사고이월 및 계약 변경 계획

2017. 12.

ㅓ

대기환경연구부

(시민생활연구팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

소음이동측정차량 측정 부품 납품 지연으로 인한 사고이월 및 계약 변경 계획

교통량 측정 센서를 부착하기 위한 지지대를 소음이동측정차량에 설치하여 교통량 및 소음을 측정하고자 하였으나, 교통량 측정 센서의 하중이 당초 예상보다 무거워 우리원의 요청으로 지지대의 설계를 변경함에 따라 연내 납품이 곤란하여 사업 추진 잔액을 사고 이월하고 납품 관련 계약을 변경하여 2018년에 지속 추진하고자 함

Ⅰ		지연 사유

□ 측정 부품을 용접·가공 후 지지대를 만들어 차량 상부에서 약 4m 높이에 설치한       후 지지대에 교통량 측정 센서를 부착하여 소음 및 교통량을 측정하고자 함

□ 교통량 측정 센서의 하중이 당초 예상보다 무거워 안전상의 이유로 납품 기한 전에       시민생활연구팀에서 설계 변경을 요청함

Ⅱ		계약 변경

****************************************************

※계약금액은 계약 변경 전·후 동일함

□ 계약 기간 : 당  초 2017.11.17.~2017.12.17.

→ 변경후 2017.11.17.~2018.01.31.

Ⅲ		향후 계획

□ 예산관련 부서에 사고 이월 요청 : 2017.12.26.까지

□ 연구지원부에 계약 변경 의뢰 : 2017.12.26.까지.  끝.