투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약의뢰- 이촌지구 자연(형)호안 복원사업 전기공사

1. 우리 본부에서 추진중인 『이촌지구 자연(형)호안 복원사업 전기공사』에 대하여 아래    와 같이 설계변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 이촌지구 자연(형)호안 복원사업 전기공사(장기계속)

나. 공사기간

- 1차  : 2017. 07. 04 ~ 2017. 12. 31

- 총차 : 2017. 07. 04 ~ 2018. 12. 28

다. 도 급 액 : (1차) 39,243,000원, (총차) 183,849,170원

라. 도 급 자 : 팬톰 주식회사   대표  최재민

마. 설계변경 사유

- 현장여건 변동에 따른 물량 증ㆍ감내역 발생

바. 설계변경 금액                                                    (단위:원)

구 분	총 괄(1회)			1차(1회)
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
도급비	183,849,170	191,580,915	증)7,731,745	39,243,000	10,875,000	감)28,368,000

사. 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복 , 자연(형) 호안 복원,

시설비100-401-01

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차) 1부.

3. 설계변경내역서(1차) 1부.

4. 제비율검증서 1부.  끝

	공원부장
주무관	임이환		생태공원과장	최병언		공원부장	12/26 문길동
협조자	총무과장	박병현
시행	생태공원과-3570	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3780-0725	/전송	3780-0740	/		/	부분공개(6 7)