함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 및 차수변경 계약의뢰 [2017년-2차 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)]

우리사업소에서 시행중인 「2017년-2차 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 설계변경

및 차수변경을 아래와 같이 계약의뢰코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년-2차 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)

나. 도 급 자 : 창협건설(주) 대표 강인제

다. 공사기간 : 2017.12.19. ~ 2018.6.30.(2차수 공사기간 2018.1.1.~2018.6.30.)

라. 변경사유 : 현장상태(계약물량 증·감)에 따른 설계변경

마. 설계변경 내용

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감 액	비 고
총 계약금액	349,680,400원	349,680,400원	-
1차수 금액	209,808,240원	0원	감209,808,240	2017.12.08.~2017.12.31
2차수 금액	139,872,160원	349,680,140원	증209,808,240	2018.01.01.~2018.06.30

바. 예산과목 :  상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 상하수도관교체비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 지원사업성시설비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

소방재난능력의향상으로안정적인재난시스템구축, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치및보수, 시설비및부대비, 시설비

따로붙임 : 1) 설계변경 사전심의 결과보고서 및 심의 의결서 각1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	한규수		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	12/26 代권승계
협조자
시행	시설관리과-35486	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4596	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)