	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	2017년도 가온용 보일러 대기배출설비 TMS 용역 설계변경 및 최종정산 시행

1. 운영과-12073호(2017.12.26.)와 관련입니다.

2. 우리센터 시행중인 「가온용 보일러 대기배출설비 TMS 유지관리 용역」건에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 최종정산을 시행하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 가온용 보일러 대기배출설비 TMS 용역

나. 계약업체: 세종 TMS 대표 권준범

다. 계약금액: 금5,999,000원(금오백구십구만구천원정)

라. 계약기간: 2017. 09. 29.~2017. 12. 31.

마. 변경 및 정산처리 내역

구 분	당 초	변 경 후	과지급 분	비 고
10월 용역비	1,499,750원	1,650,000원	150,250(+)	회계연도 도래 정산처리
11월 용역비	1,499,750원	1,650,000원	150,250(+)
12월 용역비(예정)	1,499,750원	1,199,250원	감 300,500(-)
1개월분 미정산	1,499,750원	0	0
합 계	5,999,000원	4,499,250원	감 1,499,750원
계약금액	당 초	금5,999,000원(금오백구십구만구천원정)
	변경후	금4,499,250원(금사백사십구만구천이백오십원정)
	증,감액	금1,499,750원(금일백사십구만구천칠백오십원정)
계약기간변경	당 초	2017. 09. 29.~2017. 12. 31.
	변경후	2017. 09. 29.~2017. 12. 31.

바. 변경사유: 당초 계약을 4개월 유지관리 용역으로 설계되었으나 회계연도 도래로 3개월 유지관리 용역으로 정산.

붙임: 보고서 1부.

합의각서 1부. 끝.

	운영과장
★주무관	도형철		주무관	박한수		운영과장	12/26 정종기
협조자
시행	운영과-12115	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(5)