함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행(2017년 동작,영등포구 관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역)-1차

우리사업소에서 시행한 『2017년 동작,영등포구 관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2017년 동작,영등포구 관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 자 : 정일산업㈜  대표 박 상 만

다. 용역기간 : 2017. 8. 9. ~ 2017. 12. 31.(총공사기간 : 2017.8.9.~2018.7.31.)

라. 설계변경 금액내역

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	161,628,900원	161,628,900원	-
1차수	96,977,340원	43,150,800원	감53,826,540
2차수	64,651,560원	118,478,100원	증53,826,540

마. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사.신설공사비

- 소방용수시설설치개보수,소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설설치 및 보수(소화전)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후밸브정비)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업소성시설비(음수대)

붙임 : 1. 설계변경 사전심의 결과 변경보고 1부.

2. 설계변경 관련 서류 1부 1부. 끝.

주무관	한규수		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	代권승계		남부수도사업소장	12/26 전영석
협조자	주무관	정은희		행정지원과장	代신민철
시행	시설관리과-35358	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4596	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(7)