문서번호	정수시설과-5083
결재일자	2017.12.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김현철		12/27 代최양교
협 조

2017년도 전기공사(연간단가)

전기설비 보수공사 작업완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2017년도 전기공사(연간단가)

전기설비 보수공사 작업완료 보고

2017년도 우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 보수공사(연간단가) 작업지시 사항을 완료하였기에 보고 드림

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2017년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 사업기간 : 2017. 4. 20 ~ 2018. 3. 31

◯ 계약금액 : 137,159,630원

◯ 계 약 자 : (주)중부전기건설 대표 조중건

□ 작업지시 및 완료보고

◯ 작업지시 사항 : 붙임 1 작업지시서

구분	1차	2차	3차	3차 추가
기간	06.30~07.21	11.15~11.30	11.29 ~ 12.08	12.04~12.08
내용	1계열 공동구 출입구 조명 철거 및 설치	구내식당 분전반 및 콘센트 전원 교체공사	고도처리장 입구 경비실에 감시용 모니터 설비 구축	고도 입구및후문 경비실 전원함, 투광등 설치
	2, 3정수지 유출밸브실 전기공사	1침전지 퇴수밸브실 배수펌프 전기공사	정문 출입구 자전거 보관소 공기주입기 전원 포설 공사	배출수처리장 메인 저압반 콘덴서 교체
	2, 3정수지 출입구 전선관 철거 설치	취수장 분전반 및 전원 교체공사	TMS 전송용 샘플링 펌프 전원과 배수펌프 전원 분리	구 농축조, 배슬러지지 미사용 정원등 철거
	산소저장탱크 콘센트함 교체	전기실 분전반 교체공사	-	배출수처리장 배슬러지지 투광등 LED로 교체
	중계펌프장 잔류염소 측정기함 설치외 1	약품실 가성소다 레벨계 설치공사 외 4공종	-	-

◯ 작업완료 보고 : 붙임2 작업 완료보고 및 사진

□ 설계변경 사항 발생

◯ 설계변경 금액내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	124,690,573	110,000,000	감14,690,573
부가가치세	12,469,057	11,000,000	감1,469,057
도급금액	137,159,630	121,000,000	감16,159,630

◯ 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경

가. 신규공종 발생 : 터파기 등 47 공종 발생, 낙찰율 88.433% 적용

나. 공사 중 물량 증․감 사항 발생

□ 보고자 의견

○ 상기 변경사항에 대해 자체 설계변경 심의결과에 따라 설계변경

○ 설계변경 계약 및 기성준공.

붙임 1. 작업지시서  4부

2. 작업완료 보고서 및 사진(용량초과로 별도 첨부) 3부.   끝.