문서번호	급수운영과-34353
결재일자	2017.12.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
권기섭		12/27 송근호
협조

준공검사(2회) 조서 제출에 따른 검토 보고서 <동일로 노후 송배수관 정비공사>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

급 수 운 영 과

준공검사(2회) 조서 제출에 따른 검토 보고서

< 동일로 노후 송배수관 정비공사>

『동일로 노후 송배수관 정비공사』시행 중 위탁공사 감독기관인 서울시설관리공단에서 준공검사(감독) 조서가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1				공사현황

○ 공 사 명: 동일로 노후 송배수관 정비공사

○ 공사규모: D=200~500mm, L=1,386m

○ 공사기간: 2017. 5. 25.~2017. 12. 27.

○ 계 약 자: 옹동건설(주) 대표 임창희

○ 계약금액: 1,793,700,000원

2				준공검사 개요

○ 공사기간: 2017. 5. 25.~2017. 12. 27.

○ 준공금액: 1,793,700,000원

○ 준공검사일: 2017. 12. 26.

○ 준공내역

계약금액(원)	준공(기성)금액(원)			집행잔액 (원)	비고
	계	금회(2회)	전회(1회)
1,793,700,000	1,793,700,000	919,453,000	874,247,000	0

3				검토사항

○ 검토사항: 준공 세부내역 타당성 검토

○ 준공 세부내역(내역서 별첨)

연번	비목	계약금액 (원)	기성금액						집행잔액		비고
			계 금액(원)	비율 (%)	전회금액(1회)		금회금액(2회)		금액(원)	비율 (%)
					금액(원)	비율 (%)	금액(원)	비율 (%)
1	재료비	344,555,680	344,555,680	100	144,848,054	0	199,707,626	57.96	0	0.00	타당
2	노무비	754,093,518	754,093,518	100	390,504,202	0	363,589,316	48.22	0	0.00	타당
3	경비	291,361,894	291,361,894	100	135,602,721	0	155,759,173	53.46	0	0.00	타당
4	순공사 원가	1,390,011,092	1,390,011,092	100	670,954,977	0	719,056,115	51.73	0	0.00	타당
5	일반 관리비	76,450,610	76,450,610	100	37,740,155	0	38,710,455	50.63	0	0.00	타당
6	이윤	166,244,662	166,244,662	100	86,074,868	0	80,169,794	48.22	0	0.00	타당
7	사무실 임대료	0	0		0	0	0		0	0.00	타당
8	고재 처리비	-2,070,000	-2,070,000	100	0	0	-2,070,000	100.00	0	0.0	타당
9	총공사 원가	1,630,636,364	1,630,636,364	100	794,770,000	0	835,866,364	51.26	0	0.00	타당
10	부가가치세	163,063,636	163,063,636	100	79,477,000	0	83,586,636	51.26	0	0.00	타당
11	도급금액	1,793,700,000	1,793,700,000	100	874,247,000	0	919,453,000	51.26	0	0.00	타당

4				조치 의견

○ 위와 같이 검토한 바 기성내역이 타당하므로, 관련부서(행정지원과)와 협의하여 준공금 지급 등 후속 업무를 추진코자 합니다.

첨부  1. 관련 공문 사본 1부.

2. 준공검사조서 1부.

3. 준공내역서 1부.  끝.