투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[2017년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가_통합 규제처리)-강서]

2017년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가_통합 규제처리)-강서』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2017년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가_통합 규제처리)-강서

2. 공사기간: 2017.03.23. ~ 2017.12.31.

3. 공사위치: 강서구, 영등포일부, 구로구, 양천구

4. 계약업체: 금화전력공사 대표 이계성

5. 설계변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비		448,186,530	508,391,670	증)60,205,140
도급비	공급가액	358,538,060	413,270,000	증)54,731,940
	부가가치세	35,853,800	41,327,000	증) 5,473,200
	계	394,391,860	454,597,000	증)60,205,140
관급자재비		50,684,150	50,684,150
이 전 비		3,110,520	3,110,520

6. 설계변경 사유

가. 계약물량 변경사항(증,감) 반영에 따른 도급비 증액 : 금60,205,140원

나. 보험료 정산(건강보험료, 연금보험료 등)

다. 산업안전보건관리비 및 퇴직공제부금비 정산

7. 예산과목: 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기

신설 및 보수, 시설비및부대비,시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경내역서 갑지 및 설계변경내역서 1부.

4. 보험료 정산 동의서 1부.

5. 고용 산재 보험 가입증명원 및 완납증명서 1부.

6. 산업안전보건관리비 정산서 1부.

7. 합의 각서 1부.

8. 검증확인서 1부.  끝.

주무관	정경성		기전과장	代장종창		강서도로사업소장	12/27 김용제
협조자	관리단속과장	代김태식
시행	기전과-16870	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)