문서번호	도로과-24965
결재일자	2017.12.27.
공개여부	대시민공개

주무관	도로계획담당	도로과장	안전건설교통국장
김용필	이상문	최광천	12/27 박형중
협 조
	기획예산과장			한재헌
	예산담당			고영용

서울시 특별조정교부금

사업예산 사고이월 계획

2017 .  12.

안전건설교통국

도 로 과

서울시 특별조정교부금

사업예산 사고이월 계획

강설로 인한 안전사고 예방 및 등굣길 학생들의 인명 피해 최소화를 목적으로 한 서울시 특별조정교부금이 연말에 교부됨에 따라 공사 기간 부족으로 사업이 년내 완료될 없어 예산을 사고이월(미필 원인행위)하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

보국문로 도로 환경개선

□ 공사개요 : 아스콘 및 미끄럼방지 포장 24a, 열선설치 L=600m

□ 공사위치 : 솔샘로 25가길 8 ~ 보국문로 160(보국문로 40길)

□ 공사기간 : 2018. 3.  ~ 2018. 10.

□ 예 산 액 : 900,000,000원

성북로4길 보행로 개설

□ 공사개요 : 인도 신설 B=1.5m, L=100m

□ 공사위치 : 성북로4길 동구여자중학교 후문

□ 용역기간 : 2018. 3.  ~ 2018. 10.

□ 예 산 액 : 60,000,000원

Ⅱ		사고이월 내역

사고이월 요구액 : 960,000,000원

○ 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 보국문로 도로

환경개선, 시설비및부대비, 시설비

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리,  성북로4길 보행로

개설,  시설비및부대비, 시설비

세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액	배정액	지출액	사고이월액	비 고
계	960,000,000	960,000,000	0	960,000,000
보국문로 도로 환경 개선	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000
성북로4길 보행로 개설	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000

이월사유

○ 강설로 인한 안전사고 예방 및 등굣길 학생들의 인명 피해 최소화를 목적으로

한 서울시 특별조정교부금이 연말에 교부됨에 따라 공사 기간 부족으로 사업이

년내 완료될 없어 관련 예산의 사고이월(미필 원인행위)이 필요함.

Ⅲ		추진경과

2017. 12. 26 : 서울시 특별조정교부금 교부

2018. 12. 26 : 간주처리 요청(기획예산과 통보)

Ⅳ		행정사항

재무과 : 관련예산 지출(미필)원인행위 요청

○ 지출원인행위 요청액 : 960,000,000원

(단위 : 원)

사 업 명	통계목	예 산 액	배정액	지출액	사고이월액	비 고
계		960,000,000	960,000,000	0	960,000,000
보국문로 도로 환경 개선	시설비	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000
성북로4길 보행로 개설	시설비	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000

끝.