문서번호	문화체육과-38278
결재일자	2017.12.27.
공개여부	대시민공개

주무관	생활체육담당	문화체육과장	복지문화국장
신봉근	김용환	代신신재	12/27 손정수
협 조
	기획예산과장			한재헌
	예산담당			고영용

- 성북펜싱전용체육관 건립 공사 - 사고이월 계획(수정)

2017. 12

복지문화국

문화체육과

- 성북펜싱전용체육관 건립 공사 -

사고이월 계획

우리구에서 추진중인 성북펜싱전용체육관 건립 공사와 관련하여 실정보고로 인하여 연내 준공이 어려워 관련예산을 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 성북펜싱전용체육관 건립

위    치 : 성북구 종암동 104-4 (종암SK아파트 104동 뒤편)

사업기간 : 2015. 6. ~ 2018. 4.

사업내용 : 펜싱전용구장, 헬스장, 샤워실 및 주차장 등

사 업 비 : 2,280백만원 (시 특별교부금 1,880, 시비보조금 400)

Ⅱ		추 진 경 과

2015. 6. : 기본방침 수립

2015. 8. : 성북구 공유재산 심의 통과

2015. 9. : 건축설계 재능기부 협약 체결(성북구청↔아르누보 건축)

2015. 9. : 기본설계

2015. 12. : 주민설명회 개최(1차)

2016. 4. : 주민설명회 개최(2차)

2016. 9. : 서울시 경관심의 승인

2017. 4. : 착공

Ⅲ		사고이월 내역

사고이월 요구액 : 870,721,160원

※ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육 증진, 생활체육시설 확충,

성북펜싱전용체육관 건립, 시설비및부대비, 시설비

세부내역

(단위 : 원 / 2017.12.27. 현재)

재원구분	예산현액	원인행위액	원인행위 지급액	원인행위 미지급액 (A)	집행잔액 (B)	사고이월 요구액 (A+B)	지출원인행위 요청액 (B)
계	2,272,220,000	2,118,668,810	1,392,799,740	725,869,070	146,978,680	870,721,160	144,852,090
명시이월 (시비)	400,000,000	271,997,850	20,956,540	251,041,310	121,429,640	372,470,950	121,429,640
명시이월 (구비)	500,000,000	476,577,550	1,749,790	474,827,760	23,422,450	498,250,210	23,422,450
사고이월 (구비)	1,372,220,000	1,370,093,410	1,370,093,410	0	2,126,590	※ 사고이월 예산의 잔액은 재사고이월 및 지출원인행위 X

※ 명시이월 시비는 2016년 시비보조금, 명시이월 구비는 2016년 서울시 특별교부금으로서 성북펜싱전용체육관 건립 명시이월 예산은 모두 시비임

이월사유

○ 2017년 4월 착공하여 11월에 준공 예정이었으나, 시공 과정에 실정보고(아파트 우수관과 폐기물 매립사항 발견)가 접수되어, 부득이 준공 시점이 연기되어 관련예산의 연내 집행완료가 어려운 상황임

○ 기 원인행위 된 명시이월 예산은 사고이월하여 2018년 준공금 지급하고, 집행잔액에 대해서는 준공 후 집기비품 등 비용발생에 대비하고자 함

Ⅳ		협 조 사 항

지출원인행위 요청 : 문화체육과 → 재무과.

○ 지출원인행위 요청액 : 144,852,090원.  끝.