	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(사당배수지 건설공사 총차분1회, 2차분1회)

1. 우리 본부에서 시행중인『사당배수지 건설공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약을 의뢰 합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 사당배수지 건설공사

2) 공사개요 : 배수지 5,000㎥(송배수관 400~500㎜, 연장 1.7㎞)

3) 공사기간

․ 총차분 : 2016. 12. 6.~2019. 5. 24.

․ 2차분 : 2017. 1. 1.~2017. 12. 31.

4) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

5) 계 약 자 : ㈜한양아크라임 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 설계변경 금액

․ 총차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	4,489,729,800	182,361,000	-4,307,368,800
공급가액	4,081,572,545	165,782,727	-3,915,789,818
부가세	408,157,255	16,578,273	-391,578,982

․ 2차분

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	1,668,656,000	175,661,000	-1,492,995,000
공급가액	1,516,960,000	159,691,818	-1,357,268,182
부가세	151,696,000	15,969,182	-135,726,818

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유 : 사정변경(사업계획 변경)에 따른 계약해지로 타절준공 정산 반영

붙임 :  1. 설계변경 시행 방침서 1부.

2. 설계변경 도서제출(건설사업관리단) 1부.

3. 설계변경 검토서(총차분, 2차분) 각1부.

4. 설계변경 내역서(총차분, 2차분) 각1부.

5. 합의서 1부.

6. 계약금액조정 검토위원회 결과 보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	윤걸		시설과장	12/27 정윤홍
협조자
시행	시설과-11106	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1494	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(7)