문서번호	평생교육과-6760
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		평생교육기획팀장	평생교육과장
강성준		김유성	12/28 김명주
협조

-서울자유시민대학 본부캠퍼스-

리모델링 통신 공사 설계 변경 계획

2017. 12.  .

평생교육국

(평생교육과)

-서울자유시민대학 본부캠퍼스-

리모델링 통신공사 설계 변경 계획

서울자유시민대학 본부캠퍼스 리모델링 통신 공사 중 현장 상황에 맞게 설계를 변경하여 본부캠퍼스 조성에 최선을 다하고자 함

□ 추진 근거

○ 지방계약법 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 서울자유시민대학 본부캠퍼스 리모델링 통신 공사 계획(´17. 10. 10.)

○ 서울자유시민대학 본부캠퍼스 리모델링 건축공사 설계변경 요청사항 알림(´17. 12. 22.)

□ 공사 현황

○ 계 약 명 : 서울자유시민대학 본부캠퍼스 리모델링 통신 공사

○ 계약일자 : 2017. 10. 24.

○ 계약상대자 : 유프로시스(주)

○ 감리사 : ㈜성문이앤티

○ 공사기간 : 2017. 10. 24. ~ 2018. 1. 21.

○ 계약금액 : 금18,300,000원

□  변경 계획

○ 변경 사항 : 공사 물량 증가 및 신규 공종 추가

○ 변경 사유 : 발주기관(평생교육과)의 요청에 따라 현장 상황에 맞게 설계 변경

○ 변경 금액 : 금31,730,000원(증액 금13,430,000원)

○ 변경 세부 내역

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
공사 비용		11,332,907	19,766,927	8,434,020
	정보통신설비공사	9,332,934	14,266,460	4,933,526	- 사무실 등 랜 공사 추가
	방송설비공사	1,999,973	1,999,973	0
	기타설비공사	0	3,500,494	3,500,494	각 실에 필요한 통신설비 추가 등
간접노무비		974,539	1,632,244	657,705
경비(기계경비 제외)		1,548,621	2,631,475	1,082,854
일반관리비		831,364	1,441,838	610,474
이윤		1,948,933	3,372,971	1,424,038
공급가액		16,636,364	28,845,455	12,209,091
부가가치세		1,663,636	2,884,545	1,220,909
총금액		18,300,000	31,730,000	13,430,000

(단위 : 원)

□  향후 계획

○ 재무과에 변경 계약 의뢰  : ’17년 12월 중

○ 준공 처리 : ’18년 1월중

붙 임 1. 감리의견서 및 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.