문서번호	시설과-8454
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
김용주		12/28 代배진수
협조
	주무관		배진수

해양관 외부방사장 등 시설개선공사

준공 정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12

시   설   과

해양관 외부방사장 등 시설개선공사

준공 정산보고

해양관 외부방사장 등 시설개선공사에 대하여 준공검사 결과 경비 및 일부 공종 감소 사항이 발생하여 정산 설계변경 하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 해양관 외부방사장 등 시설개선공사

□ 공 사 비 : 금805,442,000원

□ 공사기간 : 2016.11.30. ~ 2017.12.23

□ 계 약 자 : ㈜엠티마스타 대표 이화선

□ 공사내용

○ 물범 등 임시사육시설 설치

○ 외부방사장 7개소 그늘막교체, 인조암보수

○ 외부방사장 수조 7개소 균열보수 및 방수공사

○ 내부 사육시설 수조 및 격리실 보수

○ 관리실 환경개선공사(화장실.샤워실 설치 및 환기설비 설치)

○ 주요 구조부 균열 보수공사 등

Ⅱ		정 산 내 용

□ 준공정산 금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
금 액	805,442,000	762,088,000	감43,354,000

□ 정산내용

(단위 : 원)

구 분	계상금액	검사결과	비 고
산재보험료	7,950,599	적정
고용보험료	1,820,268	적정
퇴직공제부금	2,000,000	1,671,600	감328,400
안전관리비	15,437,410	7,894,500	감7,542,910
환경보전비	1,708,002	250,000	감1,458,002
수용성에폭시페인트 바닥	27,649,560	18,028,410	감9,621,150
수용성에폭시페인트 벽	30,800,235	15,605,775	감15,194,460
일반관리비, 이윤 등			감9,209,197
합 계			감43,354,000

□ 퇴직공제부금, 안전관리비, 환경보전비 정산

○ 제출된 지출 증빙자료를 검토하여 정산함

□ 해양관 내·외부수조 수용성에폭시페인 도장 두께가 계약내역서의 규격에 부족하므로 부족분에 대하여 감액처리

공 종	규 격	현장시공	비 고
수용성에폭시 페인드 바닥	두께 5mm	두께 0.5~3mm	부족분 감액
수용성에폭시 페인드 벽	두께 2mm	두께 0.5mm	부족분 감액

Ⅲ		처 리 의 견

□ 위와 같이 경비 및 도장두께 부족분에 대하여 정산 처리하고자 함

붙임 : 1. 정산 내역서, 일위대가, 수량산출서 각 1부.

2. 현장조사 사진 1부.  끝.