투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제 목	교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장승인 요청(퇴계로)

1. 기전과-11574호(2017.10.19.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사와 관련 아래와 같이 교통신호기     원인자부담공사 공사기간 연장승인을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사

나. 공사장소 : 중구 퇴계로(회현역 ~ 퇴계로지하차도)

다. 공사기간 연장내용

- 당초 : 승인일로부터 ~ 2017.12.31.

- 변경 : 승인일로부터 ~ 2018.06.29.

라. 연장사유 : 선행공정(토목) 지연.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	호정오		건축설비과장	代이호완		설비부장	전결 12/28 권오식
협조자
시행	설비부-21967	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개