문서번호	도시철도토목부-16947
결재일자	2017.12.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	12/29 김진팔
협 조

지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』

공법변경에 따른 설계변경 적용 검토보고

2017.  12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『지하철9호선 3단계 922공구 건설공사』

공법변경에 따른 설계변경 적용 검토보고

「서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사」시행 중 937정거장 #1출입구 및 환기구 등의 공법변경으로 본부 설계변경 자문회의에 따른  둔촌재건축조합 위탁공사비의 설계변경 적용에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거

-  922공구 공법변경에 따른 자문회의 보고(지감922-17-600호, 17.12.20.)

1		사업개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

❍ 위    치 : 올림픽공원역~강동구 둔촌동 산29번지 일원

❍ 규    모 : 총연장 1,470m【본선 1,370m, 정거장 1개소, 환기구 4개소】

❍ 공사기간 : 2010.09.16 ~ 2018.12.31

❍ 도 급 비 : 143,517백만원

❍ 시 공 사 : ㈜대우건설 외 4개사

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 2개사

2		보고내용

□ 공사비 적용 검토

공 종	당초계약	시공사 작성(변경안)	감리 검토의견	비 고
토공(굴착) 토공(운반)	주간 13.5KM	주간. 야간할증(125%)	주간, 야간구분 분리적용	추후 실정산
		운반거리 : 41.5km	추후 실정보고 정산
구조물공 및 PC 운반거리	주간(RC)	주간, 야간할증(125%)	주간, 야간구분 분리적용	추후 실정산
		태영PCM(익산)200KM	금회 실정보고 적용
자전거주차장	반영	미적용(당초계약조건 명기)	추후 실정보고 정산	지상주차대
공법변경설계비	-	반영(119백만원)	삭제(시공사 협의)	분쟁예방
가설공(추가)	-	추가항목 반영	일부공종, 부분적용 (현장,형평성 고려)	추후 실정산
공사손해보험	-	본공사 E/S포함시 10%이상(증액요구)	규정에 따라 총괄 적용

□ 공종별 설계변경 적용 여부

세부항목		설 계 변 경 예 산 검토			감리단검토
		①922공구계약 본 공사	②둔촌조합 위탁공사(당초)	③시공사 요구 위탁공사(변경)	④건설사업관리용역
설 계 사		유신eng 동부eng	경원eng	토류공-동인eng PC구조-태영PCM	㈜선진eng
공사기간/개월		‘09.9~’18.12	‘17.8~’19.07/ (24개월)	‘17.8~’18.10/ (15개월)	-
출입구#1외 환기구		향후 ∆약30억	설계신규적용	내역조정적용	본 공사 및 위탁공사 분계
자전거주차장#1		반영	설계 반영	미반영	변경 실정보고 (지상식 주차시설)
15) 지장물이설비		`
부지임대료		2016.3까지반영	-	34,000,000	34,000,000(본공사 적용)
공사손해보험료		-	-	408,710,700	총괄 순 계약금액 확정반영
설계비(R.S.W)		-	-	62,000,000	삭제(분쟁 예방)
설계비(PC)		-	-	57,000,000
1.1 가설공			-
현장사무소		2016.3까지반영	-	150,853,716	150,853,716(본공사 적용)
교통정리원		TURN-KEY	-	45,696,375	45,696,375
점검통로 설치/철거			-	45,801,480	불필요 삭제
작업계단 설치/철거			-	18,211,475	18,211,475
공사용조명(개착구간)			-	92,912,400	92,912,400(실정산)
보안등 설치			-	638,392	638,392
현장정리및청소			-	6,155,862	6,155,862
임시전력비			-	64,356,864	64,356,864(추후실정산)
축중기 설치		-	-	3,463,105	불필요 삭제
폐기물처리 및 운반		TURN-KEY	-	63,281,644	추후 실정산
측량 조사비			-	3,799,600	3,799,600
이동식가설 방음벽설치			-	9,499,000	9,499,000
공사용 침사조			-	2,849,700	2,849,700
간이 세륜시설			-	18,998,000	18,998,000
문화재 지표조사			-	949,900	949,900
하수관 CCTV 조사			-	1,899,800	1,899,800
난간설치			-	16,167,072	16,167,072
토 공	굴착	TURN-KEY	577,857,109	882,825,498	882,825,498(추후정산)
	운반		268,312,445	398,944,565	268,312,445(추후정산)
구조물	구조물	TURN-KEY	1,223,328,342	2,344,900,534	2,344,900,534(추후정산)
	PC운반			66,446,790	66,446,790(실정보고)
R.S.W수수료(특허)		-	-	109,000,000	103,539,100
우기대비 양수시설		TURN-KEY	-	123,546,368	107,838,520
직접비계		∆약30억	2,069,497,896	5,032,908,840	4,055,997,327
간 접 비			558,764,431	884,353,487	945,265,000
합 계			2,628,262,327	5,917,262,327	5,001,262,327
차 액			-	③-② 증)3,289,000,000	④-② 증)2,373,000,000
도급액			8,810,000,000	12,099,000,000	11,183,000,000

□ 책임감리원 검토의견

❍ 현장여건 고려 시공사 요구 추가예산을 당초 설계예산 작성시 분쟁 항목중 동일시기 운용에 따른 가설사무실 등은 본 공사에 적용(현 총괄 계약금액에 포함된 출입구#1외 환기구 정산[감액]시 공제)

❍ 객관적 입증된 추가 불가피한 가설공사는 9차공사 변경예산에 적용 원활한 추진

❍ 개통대비 공사의 시급성 감안 토공 및 구조물공을 주간과 야간으로 구분 현장의 애로사항 및 긴급 돌관공사 비용을 반영토록 하고 위탁자의 분별과 타당성 확보 조치

❍ 공사추진 중 발생 운반거리 변경은 주공정 추진관련 PC구조물은 금회 실거리로 실정보고 적용하고 토공사는 해당공종 완료시 실거리 정산 실정보고 후 반영, 향후 발생 추가 공종은 사안 발생 시 실정보고 및 승인 후 추가 반영과 조합에 통보

❍ 공사손해보험 증액건은 922공구 건설공사 당초 순계약금액의 실증액[(건설진흥법 설계변경 제64~66조)10% 이상시 해당, 위탁공사비는 200억 미만 비해당]은 총괄금액 확정 후 재정사업으로 계약변경에 반영하여 현장의 시급성, 시공사의 시공성과 안전성 확보 추진

(지감 922-17-572,‘17.12.8 지시)

❍ 본 위탁공사의 공법변경에 따른 계약변경은 위탁자에 대한 성실 신뢰성의 확보와 기 체결된 협약서를 준수하는 기본 원칙에 따라 추진함이 타당할 것으로 사료되며, 변경계약 이전 선 수행되어야 할 제반 계획서(안전, 품질, 공사시공 등) 및 보고서(하도급, 실정보고, 자재승인, 검수, 조사 등)행정을 수행하여 원활한 현장수행을 추진함이 타당할 것으로 판단됨.

3		조치의견

❍ 개통대비 공사의 시급성 등을 감안하여 #1출입구 등의 변경은 불가피한바, 상기 책임감리원 의견과 같이 승인하고 차질 없이 공사를 추진코자 하며,

❍ 소요공사비는 개통의 시급성으로 불가피한 사항으로 설계변경 시 반영하여 둔촌주공아파트 재건축조합에서 부담토록 조치

- #1출입구 등 공사비

(단위: 백만원)

구분	당초	변경	증·감	비고
공사비	8,810	11,183	증) 2,373

붙임 : 책임감리원 공법변경에 따른 실정보고 1부.  끝.